문서번호	방재시설부-1272
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	01/30 임춘근
협조
	주무관		김달용

「경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역」

물가변동에 의한 계약금액 조정검토

2015. 01.

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역』

물가변동에 의한 계약금액 조정검토

「경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역」의  계약사로부터 감리용역 물가변동(제1회)반영실정보고에 대한 검토임

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015 –37(2015.01.15.)호

Ⅰ

용역개요

□ 용 역 명 : 경의선숲길,경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역

□ 과업위치 : 경의선 – 용산구 용산문화체육센터 ~ 마포구 가좌역

경춘선 – 노원구 공릉동 공덕제2철도건널목 ~ 육사삼거리

□ 내    용 : 공원조성(조경/토목/전기/통신/폐기물처리용역 등)

□ 용역기간 : 2013.11.27~2016.5.14

□ 용 역 비 : 1,310,200,000원

□ 용 역 사 : ㈜유신, ㈜건일엠이씨

Ⅱ

감리단 보고내용

□ 감리용역 물가변동(제1회)반영검토

계약 체결 후 계약금액을 구성하는 각종 품목 또는 비목의 가격이     상승 또는 하락된 경우 그에 따라 계약금액을 조정함으로써 계약     당사자의 원활한 계약이행을 도모

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

- 동법 시행령 제73조 및 동법시행규칙 제72조

- 기술용역계약 일반조건 15조

○ 계약금액 조정대상 여부 검토

계약금액 조정요건 : 2가지 조건 동시 충족

- 계약체결일 이후 90일 경과

- 품목 및 지수조정률 3%이상(품목조정 적용)

○ 물가변동(제1회)금액 산출

구 분	검토내용	비 고
비교시점	2013.11.27	계약체결일
조정기준일	2015.01.01	계약 체결 후 90일 이상 경과
계약금액	1,184,409,091원	공급가액, 부가세 및 손해보험료 제외
물가변동 제외대가	646,658,724원	2013.11.27. ∼ 2014.12.31
물가변동 적용대가	537,750,367원	2015.01.01. 이후
물가변동 반영대가	558,747,859원
물가변동 조정금액	20,997,492원
물가변동율	3.90%

○ 공제금액 산출

구 분	검 토 내 용	비 고
선금	35.47%	2차용역금액/계약금액
물가변동 적용대가	537,750,367원	2015.01.01. 이후분
선금공제 비대상	56,599,999원	장래 3차 용역분
선금공제 대상	481,150,368원	물가변동적용대가-선금공제 비대상
공제금액	6,662,986원	공제금액 선금공제대상금액×물가변동율×선금율

○ 물가변동(제1회)조정 반영금액(물가변동 조정금액-공제금액)

구 분	검 토 내 용	비 고
물가변동조정 반영금액	14,334,506원	물가변동조정금액-공제금액

○ 감리원 배치기간

- 분야별 상주감리원 투입 기간(개월수) : 변경없음

- 전기/통신 상주감리원 투입계획(일정) : 변경(근무계획표 참조)

· 관련근거 : 방재시설부-12448(2014.12.01.)호, 설비부-10945(2014.10.07.)호

○ 계약금액(도급액) 변경

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
전 체	1,310,200 천원	1,326,000 천원	증) 15,800 천원
금회(2차)	997,600 천원	1,011,780 천원	증) 14,180 천원

Ⅲ

감리단 검토의견

○ 상기와 같이 『경의선숲길, 경춘선 폐선부지 공원조성공사 통합 전면책임감리용역』물가변동(제1회)반영에 대하여 검토한 결과 관련 법규,

조정요건, 산출내용 등이 적정하다고 판단됨.

Ⅳ

보고자 조치의견

○『경의선숲길, 경춘선 폐선부지공원조성공사 통합 전면책임감리용역』물가변동으로 인한 계약금액조정건에대하여관련 규정에 의한 검토결과, 상기 보고내용과 같이 용역계약금액 변경 및 전기/통신 상주감리원 투입에 대해 설계변경함이 타당한 것으로 판단되어 실정보고 사항 승인조치하고자하며, 향후 설계변경 시 반영하도록 감리단에 통보하고자 함.

붙  임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.