문서번호	원무과-1451
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	원무과장
김경종	조선행	01/30 김종환

서북병원 음압유지시설 TAB 및 폐기물처리 용역

준공기한 연장검토 보고

2015. 1.

서울특별시 서북병원

(원 무 과)

서북병원 음압유지시설 TAB 및 폐기물처리 용역

준공기한 연장검토 보고

우리병원에서 시행중인 음압유지시설 설치공사 관련 TAB 및 폐기물처리 용역에 대한 준공기한 연장검토를 보고 드림

□ 용역개요

용 역 명	계 약 자	계약금액(원)	용역기간
TAB 용역	㈜범창종합기술	19,800,000	‘14.9.29 ~ ‘15.1.30
폐기물처리 용역	서울환경,(주)아이케이	7,800,000	‘14.10.21 ~ ‘15.1.31

□ 검토내용

❍ 준공기한 연장

용 역 명	당 초	변 경	비 고
TAB 용역	‘14.9.29. ~ ‘15.1.30.	‘14.9.29 ~ ‘15.2.16.	17일 연장
폐기물처리 용역	‘14.10.21. ~ ‘15.1.31.	‘14.10.21 ~ ‘15.2.16.	16일 연장

❍ 연장사유

〈TAB 용역〉

- 14병동 TAB 측정결과 공조기 송풍기 성능 및 덕트 개선 작업 선행 후 TAB 재측정이 필요하므로 준공기한을 ‘15. 2. 16.까지 연장함.

〈폐기물처리 용역〉

- 당초 폐기물 처리가 폐콘크리트(83톤), 혼합폐기물(28톤) 설계되었으나

- 공사 진행 과정에서 혼합폐기물이 90톤으로 증가되어 폐기물 정산 및 추가 예산확보를 위해 준공기한을 2015. 2.16.까지 연장하고자 함

□ 행정사항

❍ 준공기한 연장에 따른 변경계약 추진