투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	「서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사」준공기한 연기의뢰

1. 시설과-565호(2015. 1. 29)호와 관련입니다.

2.『서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사』와 관련하여 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

가. 공 사 명 : 서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사

나. 계 약 자 : ㈜주원공영 대표 김 형 균

다. 계약금액 : 일금삼억팔천이십오만오천구십칠원정(\380,255,097원)

라. 변경내용

구 분	변 경 내 용		비 고
	당 초	변 경
공사기간	‘14.12.05 ~‘15.02.02	‘14.12.05 ~‘15.02.16	14일간

마. 연기사유

-  동물복지과에서 요청한 추가 공사로 인한 절대공기 부족

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 예산과목 : 공원이용시민 만족도향상, 동물의 건강 증진 및 종 보존, 공원안전시설 보수 및 정비, (100-401-01) 시설비, 동물사 및 방사장 안전시설 설치

첨부 : 방침서 1부.  끝.

	시설과장
★주무관	이강호		시설과장	01/30 공헌구
협조자	주무관	이상국
시행	시설과-577	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1) 서울대공원	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7412	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개