문서번호	역사도심재생과-1106
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	역사도심재생과장	재생정책기획관		도시재생본부장
박운용	김해성	한규상		01/30 이제원
협 조
	도심계획팀장		손창익

준공기한 연기 보고

(낙원상가·돈화문로 주변지역 활성화전략 수립 용역)

2015. 1.

도시재생본부

(역사도심재생과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

준공기한 연기 보고

(낙원상가·돈화문로 주변지역 활성화전략 수립 용역)

건축기획과에서 수행중이던 ‘낙원상가·돈화문로 주변지역 활성화전략 수립 용역’이 조직 개편으로 업무이관(`15.1.15)됨에 따라, 이 지역의 역사·문화적, 도시계획적 의미 및 활성화 목적, 세부계획 등에 대한 종합적인 재검토 필요하여 용역 준공기한을 연기코자 함.

□ 용역개요

○ 대 상 지 : 종로구 낙원상가·돈화문로 일대

○ 계약금액 : 285,318천원

○ 용역기간 : 2014.4.18.~2015.2.11.

○ 용 역 사 : (주)PMA엔지니어링, 일로건축사사무소, (주)도시미래종합기술공사

○ 총괄계획가 : 김선아(스튜디오SAK, 공공건축가)

○ 과업내용

- 대상지역 분석·진단 및 현안 문제점 발굴

- 지역 활성화 전략 목표 및 구상, 활성화사업 등 전략 수립 등

□ 그간 추진사항

○ ’14. 4.18 : 용역 계약 및 착수, 총괄계획가 위촉

○ ’14. 5.02 : 용역 착수보고

○ ’14.6~12 : 용역 중간보고(주택정책실장)

○ ’15.1.14. : 업무이관 방침(건축기획과-793)

○ ’15.1.15. : 업무이관(건축기획과→역사도심재생과)

○ ’15.1.29. : 용역 중간보고(도시재생본부장)

□ 준공기한 연기

○ 준공기한

- 당 초 : 2015. 2. 11

- 변 경 : 2015. 5. 11(3개월)

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

○ 연기사유

- 조직개편으로 당해 용역이 업무이관(`15.1.15, 건축기획과→역사도심재생과)됨에 따라 이 지역의 역사·문화적, 도시계획적 의미 및 활성화 목적, 세부계획 등에 대한 종합적인 검토가 필요하며 이에따른 절대공기부족

□ 행정사항

○ 재무과에 용역 준공기한 연기 의뢰.  끝.