투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 요청[2014년 횡단보도 신설 교통신호기 공사(송정동)]

1. 기전과-697호(2015.1.30.)와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인『2014년 횡단보도 신설 교통신호기공사(송정동)』에 대하여 변경계약(준공기한 연기) 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 횡단보도 신설 교통신호기 공사(송정동)

나. 계 약 자 : ㈜민호전설 김민희

다. 공사기간 : 2014.12.12 ~ 2015.02.28

라. 계약금액 : 16,038,000원

마. 연기사유 : 선행공정(토목) 지연으로 공사시기 미도래

바. 공사기간 연기

구 분	공 사 기 간		비 고
	변 경 전	변 경 후
공사기간	2014.12.12.~2015.02.28	2014.12.12.~2015.06.30	공사금액변경 없음

사. 연기귀책사유 : 서울특별시 성동도로사업소

아. 지체상금 부과여부 : 미부과

자. 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전 시설물관리,                            보행불편해소를위한 횡단보도 확충정비, 시설비(401-01)

붙     임 : 1. 준공기한 연장 검토보고 1부. 끝.

	기전과장
주무관	차준원		기전과장	01/30 최주용
협조자	주무관	이명호
시행	기전과-701	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차 시장길 41(용답동) 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/	michael3770@seoul.go.kr	/	대시민공개