보고서(급수공사준공연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	代권영안	01/30 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-2412

「광진구 상수도공사」 감독업무 수행 중 아래와 같은 상황이 발생하여 보고합니다.

2015. 1. 30.

*****************************

제목 : 급수공사 준공 연기

□ 현   황

○ 공사명 : 동부수도사업소 광진구 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 위  치 : **************

○ 계약자 : ***************

○ 작업지시 번호 : 교체장애-7

○ 공사기간 : 2015.01.14.~2015.01.30.

□ 보고내용 및 조치의견

○ 위의 공사는 2015.01.30.까지이나 교체장애 공사로 수도계량기 보호통 교체와 관련하여 주민과 일정 협의후 아래와 같이 준공기간을 연기하여 신뢰받는 상수도 행정에 기여하고자 합니다.

- 당초 공사기간 : 2015.01.14.~2015.01.30.

- 변경 공사기간 : 2015.01.14.~2015.02.03.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

따로붙임 : 급수공사 작업기한 연기요청서 1부(별첨).  끝.