문서번호	공간정보담당관-8877
결재일자	2014.8.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보운영팀장	공간정보담당관
유병민		代강재구	08/22 조봉연
협조
	주무관		강재구

‘3차원 실내공간모델링 구축사업의 원할한 추진을 위한’

데이터 구축, 인력운영 변경 및 홍보계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

정 보 기 획 단

(공간정보담당관)

‘3차원 실내공간모델링 구축사업의 원할한 추진을 위한’

데이터 구축 인력운영 변경 및 홍보계획

‘14년 서울형 뉴딜일자리 사업 일환으로 추진 중인 3차원 실내공간모델링 구축사업의 사업기간 동안 목표량 달성 및 안정적인 일자리 지원을 위한 데이터 구축 인력운영 변경 및 외부 홍보계획

□ 추진 목적

❍ 3차원 실내공간모델링 완성도를 높이기 위한 데이터 구축 인력운영 변경

❍ 실내공간정보 활성화로 안정적인 일자리 지원을 위한 3차원 실내공간모델링 구축사업 외부 홍보

□ 사업 개요

❍ 사 업 명 : 3차원 실내공간모델링 구축 사업

❍ 구축기간 : 2014. 4 ~ 2014. 10(7개월)

❍ 구축방안 : 만 39세 관련분야 청년 일자리 창출을 통한 구축

❍ 작 업 장 : 은평구 통일로 688〔(구)질병관리본부 22동 4층〕

❍ 선발인원 : 50명(40명, 2014. 8.현재)

❍ 소요예산 : 549 백만원

구 분	내 용	소요 금액 (백만원)	비 고
인 건 비	데이터 구축자, 측량 및 품질검수자 등 50명 인건비 및 보험료	461
사무관리비	S/W 임대, 사무실 관리비 등	88
계		549

□ 데이터 구축 계획

❍ 구축 목표 및 현재 구축량

계	공공 건축물	지하철역	기타	비 고
50 동(개소)	18 동	30 개소	2 개소	계획 물량
23 동(개소)	8 동	15 개소	-	현재 구축량

※ 서비스를 위한 POI, 네트워크정보 등 현장조사, 데이터 정확도를 위해 품질검수 및 측량실시

❍ 데이터 구축 계획

- 총 3차에 걸쳐 구축 목표량 달성

․1 차 : 22개소(지하철 : 14, 공공건축물 : 8)

․2 차 : 20개소(지하철 :  9, 공공건축물 : 11)

․3 차 :  8개소(지하철 : 6, 지하상가 : 2)

□ 인력운영 변경계획

❍ 인력운영 추진방향(3차 데이터 구축시부터)

구 분	기 존	변 경	운영 세부사항
모델링 구축	35 명	32 명	․ 1, 2차 데이터 수정 : 14명 ․ 3차 데이터 구축 : 18명
품질관리 및 검수	2 명	2 명	․ 품질관리 및 검수
측 량 검 수	3 명	3 명	․ 측 량 검 수
경로정보구축 및 이미지 편집	-	3 명	․ 경로정보구축 등 : 3명

□ 홍보계획

❍ 외부행사 및 전시공간 홍보물 배포

- 3차원 실내공간모델링 구축사업 리플렛 제작 및 배포

- 스마트국토엑스포 전시부스, 서울시신청사 ‘시민청’ 배부

❍ 중앙정부 아이디어 경진대회 및 연찬회 등 발표홍보

- 스마트국토엑스포 아이디어 경진대회 정책제안 : 2014. 8. 25.

- 지방행정정보화 연찬회 서울시 사례 발표 홍보 : 2014.10. 27.

□ 행정사항

❍ 홍보물 제작 : 리플릿 1000부

- 홍보물 비치 : 스마트국토엑스포 전시부스 및 시민청 안내데스크

- 예 산 과 목 : 경제진흥실 일자리정책과, 실업없는 서울구축, 사회적일자리 제공, 서울형 뉴딜일자리, 사무관리비(201-01).  끝.