문서번호	공간정보담당관-6845
결재일자	2014.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보운영팀장	공간정보담당관
유병민		김용민	07/02 조봉연
협조
	주무관		장인호

『3차원 실내공간정보시스템 및 활용서비스 개발사업』 주간보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

공간정보담당관

(공간정보운영팀)

□3차원 실내공간정보시스템 및 활용서비스 개발 사업□

주간 보고(5월 3주 ~ 6월4주)

-  -

사 업 명	3차원 실내공간정보시스템 및 활용서비스 개발 사업
사업기간	2014.5.9. ~ 2015.2.2.	사 업 자	버츄얼빌더스(주)
사 업 비	410,050천원	사 업 PM	버츄얼빌더스(주) 김도윤 이사
사업진행 현황	○ 사업수행계획서 및 보안서약서 접수 ○ 착수보고회 개최 ○ 사업범위 및 계획수립 ○ 개발서버 구축 및 소프트웨어 준비 ○ 요구사항(소방/방재) 분석

진행단계	착수 단계		전체 진척율	15.27%
업무구분	실적(2014.05.09 ~ 2014.06.25)		계획(2014.06.26 ~ 2013.07.2)
사업관리	□ 계약체결 : 5.9. □ 착수팀 구성 : 김도윤 PM 외 4명 - PM : 김도윤 본부장 - 개발담당 : 박성호, 심원일 - 사업관리 : 도상래, 최현호 □ 착공신고서 제출 : 5.12. □ 사업수행계획서 및 보안서약서 제출 : 6.2. □ 선급금신청(40%) : 6.19. □ 사업범위 및 계획수립 - 세부공정표 작성, 범위 설정 및 계획수립		□ API연계 협의 : 6.26 - 소방안전지도시스템 3차원 실내지도 API 연계
시스템 개발	□ 개발서버 구축 및 소프트웨어 준비 및 설치 - 개발서버 구축 완료 - 형상관리용 S/W(SVN 세팅) □ 문서작성지침서 - 서울시 S/W 개발방법론 기준 □ 요구사항 분석 및 기본설계 - POI구축 및 소방/방재 요구사항 분석 □ 시스템 개발자료 수집 - 절대좌표화 구현위한 자료수집 - 3DS, KML, CityGML 자료수집 - 서울시 실내모델링 데이터 자료 분석		□ 요구사항 기술서 작성
기타	□ 착수보고회 실시 - 일 시 : 2014.6.2.(월) 14:00 - 장 소 : 서소문별관 3동 1층 영상회의실 - 참석자 : 공간정보담당관 외 14명 □ 요구사항 분석 협의 - POI구축(서울시립대 이지영 교수) - 소방/방재(서울소방재난본부)		□ 서울소방재난본부 협의 - 일 시 : 2014.7.1.(화) 14:00 - 장 소 : 서울소방재난본부 회의
미결업무 및 대책	내 용		대책 및 조치사항
협의사항	□ 과장님 지시사항(6.2. 착수보고회 시) - Linked Data도 고려 -‘13년 DB 유지관리를 위한 지원(교육 등) - 부산벡스코 라이다스캐닝데이터 융합방안 고려 - 여러데이터 기술 등 팩키지화 한 팩키지 수출(전자정부 수출 방안) 방안 마련 - OpenAPI를 활용한 전송속도 고려도 중요하지만 활용측면 실내지도 뷰어 및 조작기능도 중요함. □ 사업 관련 협의사항 - 3차원 실내공간모델링 구축사업단 긴밀한 협조체계 유지 - API 등 관련시스템(소방안전지도 등) 담당자 협의 진행 - 스마트 국토엑스포 등 대외 홍보방안 협의
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용