문서번호	도로보수과-722
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
윤철식	박일연	김환겸	02/02 송상영
협 조
	주무관		송광석
	주무관		이문희
	주무관		이민호
	주무관		탁영우

2015년 도로보수사업 추진계획

동부도로사업소

(도로보수과)

2015년 도로보수사업 추진계획

우리 사업소에서 유지․관리하는 아스팔트 포장도로 및 도로․교통안전 부속물(맨홀, 노면표시 등) 유지관리에 따른 세부 추진계획을 수립‧시행하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성과 조기 발주를 통해 시민불편사항을 최소화 하고자 함.

Ⅰ		추 진 방 향

〇 안전하고 쾌적한 도로⦁교통환경 제공으로 대시민 행정서비스 향상

〇 철저한 품질관리 및 안전관리로 도로시설물 공용수명 연장

〇 시민을 최우선으로 생각하는 효율적 업무 추진으로 공사중 시민 불편 최소화 및 예산절감

Ⅱ		도로 및 도로․교통안전 부속물현황

〇 관리도로 : 총 36개 노선(연장 152.02km, 면적 5.745㎢)

〇 도로부속물

중앙분리대	방호울타리	미끄럼방지	충격흡수	과속방지
7,862m	1,000m	29,175㎡	79개소	3개소 76㎡

〇 교통안전부속물

시선유도표지	시선유도봉	갈매기표지	도로반사경	무단횡단방지
335개	1,531개	83개	10개소	871m

Ⅲ		2015년 사업비 재배정 현황

⇒ 총 6건 12,510백만원

[1] 포장도로유지보수	:	5,860	백만원
- 노후포장도로 정비공사 (본청예산 : 388억원) - 포장도로 긴급복구공사(연간단가) (본청예산 90억) - 버스중앙차로 정비공사 (본청예산 28억) - 포장도로 예방적 보수공사 (본청예산 10억) - 소성변형구간 정비 (노후포장정비예산 3억)		4,140 1,000 300 120 300	백만원(예정) 백만원(예정) 백만원(예정) 백만원(예정)	2월10일 재배정 2월10일 재배정 2월10일 재배정 5월경 재배정 노후정비예산
[2] 도로굴착복구기금	:	4,654	백만원
- 굴착복구공사 - 건설사업감리용역(검측감리) (굴착복구 및 노후포장도로정비)		4,000 654	백만원(재배정) 백만원(예정)
[3] 불량맨홀 정비 (본청예산 36억)	:	500	백만원(예정)
[4] 노면표시 일상유지보수	:	706	백만원(예정)	2월4일 재배정
[5] 도로교통안전 부속물보수	:	490	백만원
- 도로부속시설물 - 교통안전시설물		400 90	백만원(재배정) 백만원(예정)	2월4일 재배정
[6] 제설대책 민간위탁	:	300	백만원(예정)

Ⅳ		사업별 발주 및 추진계획

[1] 포장도로 유지보수공사

〇 기본방향

- 정비대상은 도로관리과와 합동조사 및 예산상황에 맞추어 결정

- 공사 전문성 확보를 위하여 노후포장도로 정비공사와 포장도로 긴급   복구공사로 분리발주

- 노후포장도로 정비공사는 1등급골재 아스콘사용을 원칙으로 함.

▸노후포장도로 정비공사 : 포장면적 약 2,452a

∙ 포장도로 SPI지수 6이하 사업대상 선정 : 코어채취후 두께결정

∙ 재생아스콘은 중층포장구간에 사용

▸포장도로 긴급복구공사(연간단가) : 포장면적 약 700a

- 포장도로 노면표시공사는 노후포장도로 정비공사와 굴착복구공사 및 포장도로 긴급복구공사(연간단가)를 통합하여 시행.

- 노후포장정비공사에 포함된 사거리 정지선 및 소성변형구간은 개질아스팔트 포장을 시행하고, 나머지 구간은 긴급복구공사로 시행

〇 소요예산배분

(단위 : 백만원)

구분	계	본공사	소성변형 정비시행	버스 중앙차로	예방적 보수	소파보수 (굴착복구포함)	폐기물 처리	노면 표시
계	5,860	3,840	300	300	120	▼300	▼550	▼450
노후포장도로 정비공사	4,140	3,040	-	-	-	▼300	▼450	▼350
포장도로 긴급복구공사	1,720	800	300	300	120	-	▼100	▼100

※ 개략 산출금액이며, 노후포장도로 정비공사 예산 배정결과에 따라 발주시행

※ 노후포장 공사비 300백만원은 굴착복구공사에 포함하여 응급복구시 작업코자 하며, 버스중앙차로예산 300백만원, 예방적보수예산 120백만원, 소성변형구간 정비(300백만원)은 포장도로 긴급복구공사에 포함 발주코자 함.

〇 사업개요 및 추진일정

- 사업개요

∙ 노후포장 : 2,452a(t=5cm : 1,834a, t=12.5cm : 618a)

∙ 긴급복구 :   700a(t=5cm :   500a, t=12.5cm : 200a)

- 추진일정

∙ '15. 02. 10. : 코어채취(18개구간 100m간격 코어채취(142점)후 포장두께결정

∙ '15. 02. 11. : 공사설계

∙ '15. 02. 11. : 계약심사(일상감사의뢰 병행)

∙ '15. 02. 24. : 공사발주

∙ '15. 03. 10. : 계약체결

∙ '15. 03. 11. : 공사착공

[2] 도로굴착복구공사

〇 기본방향

- 재배정 예산에 맞추어 발주하고, 연간단가계약으로 시행

- 도로유지관리 측면을 고려하여 가급적 차로단위 복구 시행

‧ 굴착복구 승인전 협의단계에 승인기관과 긴밀히 협의

- 폐기물처리용역은 굴착복구공사 건으로 별도 발주.

- 여름철 우기시 도로소파로 인한 긴급복구가 가능토록 소규모 소파보수 공종을포함하여 발주

〇 소요예산

(단위 : 백만원)

계	본공사	건설사업감리용역 (굴착 및 노후정비)	폐기물처리	노면표시
4,654	3,650	654	▼150	▼200

※ 본공사에 노후포장도로 정비공사 예산(300백만원) 포함하여 발주하여

차로복구시 연접된 노후구간포함 및 우기시 소파보수시행

〇 사업개요 및 추진일정

- 사업개요 : 직접복구 150a, 차로단위 복구 550a

- 추진일정

∙ '15. 02. 02. : 공사설계

∙ '15. 02. 02. : 계약심사제외

∙ '15. 02. 02. : 공사발주

∙ '15. 02. 26. : 계약체결

∙ '15. 02. 27. : 공사착공

[3] 불량맨홀 정비공사

〇 기본방향

- 도로관리과 재배정 예산에 대하여 효율적인 업무추진을 위하여   연간단가계약으로 시행하며, 발주 및 계약방법은 도로관리과 검토   내용에 의거 시행

- 유지관리과정 긴급사항 발생시 우선 작업지시

- 노후포장도로 및 긴급복구공사 시행시 도로 종·횡단구배 조정에    따른 도로단차 발생구간 및 불량맨홀 구간에 대하여 정비 시행

〇 소요예산

(단위 : 백만원)

계	불량맨홀정비	비고
500	500

〇 사업개요 및 추진일정

- 사업개요 : 맨홀정비 872개(통신, 상수도, 하수도 등)

- 추진일정

∙ '15. 02. 23. : 신기술 활용심의

∙ '15. 02. 24. : 공사설계

∙ '15. 02. 25. : 계약심사

∙ '15. 03. 03. : 공사발주

∙ '15. 03. 12. : 계약체결

∙ '15. 03. 16. : 공사착공

[4] 노면표시 일상유지보수공사(연간단가)

〇 기본방향

- 교통운영과 재배정 예산에 대하여 효율적인 업무추진을 위하여   연간단가계약으로 시행

- 유지관리과정에 긴급사항 발생시 우선적으로 작업지시

〇 소요예산

(단위 : 백만원)

계	노면표시 일상유지보수	비고
706	706

〇 사업개요 및 추진일정

- 사업개요 : 노면표시 210,000m, 차선제거 12,000m.

- 추진일정

∙ '15. 02. 04. : 공사설계

∙ '15. 02. 06. : 계약심사

∙ '15. 02. 16. : 공사발주

∙ '15. 03. 13. : 계약체결

∙ '15. 03. 16. : 공사착공

[5] 도로․교통안전 부속물 유지보수공사

〇 기본방향

- 도로관리과 및 교통운영과 재배정 예산에 대하여 효율적인 업무   추진을 위하여 통합발주하고, 연간단가계약으로 시행

- 유지관리 중 긴급사항 발생시 우선 작업지시

- 세척계획에 의거 단가계약에 세척물량 반영

〇 소요예산

(단위 : 백만원)

계	도로부속물	교통안전시설물	비고
490	400	90

〇 사업개요 및 추진일정

- 사업개요 : 도로표지병 15,544개, 시선유도봉 530개, 중앙분리시설

200m, 충격흡수시설10개, 시설물 세척 등

- 추진일정

∙ '15. 02. 02. : 공사설계

∙ '15. 02. 02. : 계약심사제외

∙ '15. 02. 03. : 공사발주

∙ '15. 02. 26. : 계약체결

∙ '15. 02. 27. : 공사착공

Ⅴ		행 정 사 항

〇 공사 발주전 계약심사 및 일상감사 의뢰

〇 2015년 노후포장도로 사업대상지 확정을 위해 필요시 기 선정된 구간 코어채취를 ‘2014년 도로굴착복구공사(연간단가)’ 업체에 작업지시하여 포장두께를 검토하여 결정코자 함.

- 13개노선 18개소 142점 코어채취

- 소요예산 : 약 9,000천원(63,000원/점×142점)

붙임 : 사업별 담당자 지정현황.  끝.