문서번호	설비부-1382
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
이상협		김창균	02/02 박기형
협조
	주무관		이기철

『서울과학관 건립공사』

설비분야 1차 준공기한 연기 검토 보고

2015. 2

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울과학관 건립공사』

설비분야 1차 준공기한 검토 보고

우리 본부에서 추진중인 『서울과학관 건립공사』 관련, 설비분야(기계,전기,통신) 1차 준공기한 연기에 대해 검토 보고 드림.

1		공 사 개 요

공 사 명 : 서울과학관 건립공사

위    치 : 노원구 한글비석로 168 (하계동 산11번지 일대)

공사규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 12,330.81㎡

분야별 공사 현황                                   (단위 : 천원)

구 분		기 계	전 기	통 신
공사기간	총차	‘14.05.08 ~ ’16.01.12	‘14.05.08 ~ ’16.01.12	‘14.04.23 ~ ’16.01.12
	1차	‘14.05.08 ~ ’15.02.28	‘14.05.08 ~ ’15.02.28	‘14.05.08 ~ ’15.02.28
계약금액	총차	3,079,887	1,792,064	891,252
	1차	700,000	700,000	350,000
시 공 사		인하공영(주)외 2개사	부민통신(주)외 2개사	㈜엠케이씨티

감 리 단 : ㈜정림건축종합건축사사무소외 2개사

2		관련근거

감리단 공사기한 연기 검토 보고서

: 정과감 제15-21호(전기), 제15-22호(통신), 제15-26호(기계)

3		준공기한 연기 내용

공사기한 연기내역

구 분		기 계	전 기	통 신
총차	당초	‘14.05.08 ~ ‘16.01.12	‘14.05.08 ~ ‘16.01.12	‘14.04.23 ~ ‘16.01.12
	변경	- 변 경 없 음 -
1차	당초	‘14.05.08 ~ ‘15.02.28	‘14.05.8 ~ ‘15.02.28	‘14.05.8 ~ ‘15.02.28
	변경	‘14.05.08 ~ ‘15.09.30	‘15.05.8 ~ ‘15.11.30	‘14.05.8 ~ ‘15.11.30
증 감		증 214일	증 275일	증 275일
비 고		계약금액 변경없음

연기사유 : 선행공정인 건축공사 지연에 따른 설비공사 시기 미도래

지연배상금 부과여부 : 미부과

감리원 검토의견

○ ‘15.7월 건축 골조공사 완료 시점을 감안 설비분야 1차분 공사기간 확보를 위한 기간이 필요함.

○ 전체 공종 진행을 고려 할 때 공사기한 연기는 적정함.

4		보고자 의견

선행공정 지연에 따른 설비분야 공사기간 연장 내용으로 감리원 검토의견 및 예정공정표 내용이 타당하므로 연기하고자 함.

따로붙임  분야별 감리검토의견서 및 예정공정표 각 1부.  끝.