투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	석촌지하차도 정밀안전진단용역 준공기한 연기 요청

우리사업소에서 시행중인 『석촌지하차도 정밀안전진단용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 석촌지하차도 정밀안전진단용역

나. 용역기간 : 2014. 09.01 ~ 2015. 02.28

다. 계 약 자 : ㈜한국구조물안전연구원  이 채 규

라. 예산과목 : 도시안전본부 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물 운영,   시설물안전점검 및 진단, 시설비

마. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경	비고
준공기한	2014. 09.01 ~ 2015. 02.28	2014. 09.01 ~ 2015. 04. 30

바. 준공기한 연기사유 : 동절기 강추위로 인한 진단일수 부족으로 준공기한 연기

붙임   1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	나철흠		시설보수과장	02/02 박용선
협조자
시행	시설보수과-563	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 대치동 2번지	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0382	/전송	02-2040-0308	/	cheolna@seoul.go.kr	/	대시민공개