문서번호	건축부-1260
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
정제국		강성욱	전결 02/02 김우성
협조

- 옛시장공관리모델링 및 한양도성 순성길 연결공사 -

석면조사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(건 축 부)

- 옛시장공관리모델링 및 한양도성 순성길 연결공사 -

석면조사 결과 보고

옛시장공관 리모델링공사 추진과 관련하여 기존 건축물 철거공사 전 석면조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		석면조사 개요

○ 추진근거 : 산업안전보건법 제38조의2

○ 조 사 자 : ㈜미래환경분석(석면조사기관 제2011-12003호)

○ 조사대상 : 시장공관 내 건축물 3개동

○ 추진경위 :

- 2015.01.05. 공사착공

- 2015.01.14. 설계설명회 개최(Kick-off Meeting)

- 2015.01.23. 석면조사 실정보고 제출(시공자 → 건축부)

- 2015.01.24. 석면조사 시행 승인(건축부 → 시공자)

- 2015.01.27. 석면조사 시행

Ⅱ		조사결과 및 처리의견

○ 조사결과(문서번호 : 현도 제2015-011호)

- 석면 의심 자재 없음

○ 처리의견

- 석면조사 결과 석면의심 자재가 없음이 확인되었는 바, 건축물에 대한 철거공사를 시행하고, 석면조사비용은 향후 계약금액 조정시 반영코자 합니다.

Ⅲ		향후계획

○ 2015.02.03. ~ 02.13   내부철거 공사시행

○ 2015.02.13. ~ 03.13   구조정밀점검 및 구조보강설계

○ 2015.03. ~ 11.         리모델링공사 시행

○ 2015.11.               공사준공 및 시설물 인계인수

붙임문서 : 석면조사보고서 - 2부.  끝.