문서번호	시설보수과-889
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김발현		정재현	02/02 이승진
협조

2015년 도로시설물 자체정밀점검 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

북부도로사업소

(시설보수과)

2015년 도로시설물 자체정밀점검 계획보고

시설물의안전관리에 관한 특별법 제6조에 의거 실시하는 안전점검 대상 시설물에

대해 서울시 기술용역 타당성 심의결과 자체 정밀점검토록 통보된 길음교등 31개

시설에 대하여 외부전문가와 합동으로 자체정밀점검계획을 수립□시행하여 안전성

확보와 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

관련근거

○ 기술심사담당관-11437(2014.7.14) - 기술용역타당성 심사요청 관련 통보

○ 도로시설관리과-109811(2011.9.8) - 2012년 도로시설물 자체 정밀점검 시행

(도시안전본부장 방침)

※ 전차 용역에서 주요부재 손상부의 위험요소가 경미한 시설물은 자체점검 시행

Ⅱ

점검대상

○ 관리시설 (총 81개소)                                    (단위 : 개소)

종 별	계	일반교량	고가차도	터널	지하차도	하천복개
계	81	41	9	8	8	15
1종	3	-	-	-	-	3
2종	25	6	2	8	3	6
법정외	53	35	7	-	5	6

○ 15년 자체 정밀점검 대상 (31개소)

계	일반교량	고가차도	지하차도	하천복개	비고
31	24개소	3개소	1개소	3개소
시설물 명	길음교,당현1교,도봉교,방학교,쌍문교,우이교, 월계2교,월곡교,진형교,세운교,새벽다리,마전교,다산교,보문3교,화랑교,장월1교,장월2교,하월곡복개교,하늘다리,월릉교,창동교,상계교,노원교,월계1교	북악스카이웨이1교, 북악스카이웨이3교, 북악스카이웨이4교	솔샘지하차도	당현천2복개, 우이천1복개, 정릉천 1복개

※ 상태평가에 의한 정밀점검 실시 시기(시특법 제6조 3항)

- A등급   → 3년에 1회이상

- B.C등급 → 2년에 1회이상

- D.E등급 → 1년에 1회이상

Ⅲ

점검계획

○ 점검개요

- 점검기간 : 2015. 2. 9 ~ 6. 30

- 점검대상 : 길음교 등 31개 시설물

- 소요예산 : 154,394천원 (인건비 146,644천원, 인쇄비 7,750천원)

- 점검인원 : 20인 (외부전문가 15인, 업무수행 담당 5인)

- 과업범위

□자료수집 분석, 외관조사, 현장시험

□외관조사 결과분석 및 상태평가 (부재별, 시설물 전체)

□외관조사망도 및 정밀점검 보고서 작성 (추가사항 발생시 별도 보고)

□세부 점검일정 및 점검계획 제출

○ 추진일정

- 2015. 2월  : 과업수행계획서 제출 및 착수보고 (각 조별 책임기술자)

- 2015. 4월  : 진행사항 중간보고 (각 조별)

- 2015. 6월  : 점검결과 최종보고 (각 조별)

- 2015. 7월  : 점검비 지급 및 시스템 입력 (각 개인별)

○ 점검방법

- 시설물 점검 수행자(담당자)와 외부전문가 합동으로 점검 시행

- 정기점검 보다 비교적 정밀하고, 정밀점검 보다는 다소 범위를 축소하여 점검

- 유지관리상 중요부분에 대하여 육안검사와 간단한 측정기구 활용하여 점검

(균열게이지, 비파괴시험 등)

- 외부전문가 기술자별 업무 범위

∙ 특급기술자 : 외관조사 및 구조적인 결함상태 체크 및 시설물의 상태평가

∙ 고급(중급)기술자 : 외관조사, 현장시험 결과분석, 용역보고서, 외관망도 작성

○ 외부전문가 선정기준

- 건설기술자 경력증명서 확인(한국건설기술인협회 발행)

- 전문성 확보 및 점검능력에 맞는 경험과 자격을 고려하여 선정

- 안전점검 경험과 사업소관리 시설물의 특성 및 상태등에 대한 지식이 많은 자

- 대상시설물 위치, 거리등을 고려하여 선정

○ 점검조 편성

구분	대상시설물	수 행 담당자	외부전문가		비고
			특급기술자	중급기술자
계	31개소	5인	5인	10인
1조	(9개소) 방학교, 진형교, 장월1교, 장월2교, 하늘다리, 월릉교, 북악스카이웨이1교, 북악스카이웨이3교, 북악스카이웨이4교,	김발현	박훈규	이종혁(고급)
				양호열(중급)
2조	(5개소) 당현1교, 세운교, 새벽다리, 상계교, 솔샘지하차도	김영원	오성균	임재곤(특급)
				장태훈(중급)
3조	(6개소) 길음교, 쌍문교, 월곡교, 마전교, 노원교, 정릉천1복개	이택호	하상우	김정태(특급)
				김성수(고급)
4조	(5개소) 도봉교, 월계2교, 다산교, 월계1교 당현천2복개	최돈용	윤현섭	김민성(고급)
				이진석(중급)
5조	(6개소) 우이교, 보문3교, 화랑교, 창동교, 하월곡복개교 우이천1복개	홍정식	이성혁	고승주(특급)
				최남호(특급)

Ⅳ

점검비용 산정

○ 외부전문가 소요인력 산출근거

- 인원산정 기준 : 시설물별 정밀점검용역 인원(안전점검 및 정밀안전진단 대가기준)

- 기술자 등급별 인원 : 2종 및 법정외 시설물은 특급기술자 33%, 중급기술자 67% 적용

※ 도로시설관리과-109811(2011.9.8) - 2012년 도로시설물 자체 정밀점검 시행

계획 참조 (도시안전본부장 방침)

시설물명	준공 년도	규 모(m)		점검인원			점검비용(천원)
		폭	연장	계	특급 1인 기준	중급 2인 기준	인건비			인쇄비
							계	특급	중급
31개 시설물				688	227	461	146,644	63,399	83,245	7,750

○ 시설별 점검비 산정 (총괄) - 별첨 세부 산출내역 참조

Ⅴ

행정사항

○ 예산현황                                                       (단위 : 천원)

건 명	계	정밀진단	정밀점검	자체점검	해빙기점검
안전점검 및 안전진단비	1,077,394	624,000	294,000	154,394	5,000

※ 예산과목

도시안전본부, 도로시설과, 교량관리, 교량시설물운영, 도로시설물(교량)

안전점검 및 진단, 시설비

○ 외부전문가 점검수당은 점검 완료 보고 후 개인별 은행계좌로 지급

-점검비는 소득세 5%공제, 주민세는 소득세의 10% 공제후 지급

○ 필요시 사업소 보유 고소작업차 지원

첨  부  1) 담당자별 시설물 현황 (총 31개 시설) 1부.

2) 시설물별 점검비 산출내역 1부.

3) 과업범위 및 보고서 작성방법 1부.

4) 시설물별 점검조 편성현황    1부.

5) 안전점검 소요인원 및 비용 산출서(총괄) 1부.

6) 서울시 기술용역타당성 심의결과(기술심사담당관실)1부.

7) 안전점검 및 진단 예산현황(1종외 시설) 1부.끝.