문서번호	시설보수과-562
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
나철흠		박용선	02/02 송상영
협조

(석촌지하차도 긴급 정밀안전진단용역 )

준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2

동부도로사업소

(시설보수과)

(석촌지하차도 긴급 정밀안전진단용역)

준공기한 연기 검토보고

본 용역 석촌지하차도 공동발생에 따른 긴급 정밀안전진단용역으로서  동절기 강추위로 인한 기상상황으로 점검 및 진단에 어려움이 있어 준공기한을 연기하여 용역추진에 만전을 기하고자함.

Ⅰ	용역개요

용 역 명 : 석촌지하차도 긴급 정밀안전진단용역

시설규모

시설물명	위 치	규격(m)		구조형식	준공연도
		폭원	연장
석촌지하차도	송파구 석촌동 248번지 (백제고분로상)	32~38	490	BOX 및 옹벽구간	1990.07.30

용역기간 : 2014.09.01.~2015.2.28

용 역 비 : 142,800,000원

용 역 사 : ㈜한국구조물안전연구원  이채규

Ⅱ	보고내용

본 용역은 석촌지하차도 하부 공동발생에 따라 긴급정밀안전진단으로서

동절기 강추위로 인해 진단에 어려움으로 준공기한 연기가 요구됨

준공기한 연기

○ 당초 2015. 02. 28  →  변경 2015. 04. 30

○ 귀책사유 : 발주청(실 용역수행기간 부족)

Ⅲ	보고자 의견

동절기 강추위로 인한 기상상황을 고려하여 준공기한을 연기함이 타당하며 재무과(계약부서)에 연기 의뢰하고자 함.  끝.