투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사 설계변경 시행

2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2014년 도로교통 소통개선사업 교통신호기 공사

2. 공사기간 : 2014.12.10 ~ 2015.02.28

3. 도 급 자 : (주)도원파워스  대표 이대원

4. 설계변경내역                                                         (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
공급가액	금39,847,137	금38,842,728	감 1,004,409
부가가치세	금3,984,713	금3,884,272	감 100,441
도 급 액	금43,831,850	금42,727,000	감 1,104,850

5. 설계변경 사유 : 계약물량 변경사항(증,감) 반영 및 법정보험료(건강보험료, 연금보험료 등) 정산

6. 예산과목 : 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화,                                  도로교통소통개선사업, 시설비(401-01).

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부(갑지포함).  끝.

★주무관	양상규		기전과장	박재경		강서도로사업소장	02/02 조병준
협조자	관리단속과장	이은엽
시행	기전과-1413	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개