투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	우이신설 경전철 주식회사 대표이사 민우영 귀하
(경유)
제목	우이신설 민간투자사업 공정관리 강화(3차) 및 건설보조금 집행관련 자료 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하며 도시철도사업부-8143호(2014.12.4), -8877호(2014.12.31)와 관련입니다.

2. 우이신설 사업 공기연장에 따른 실시계획승인 이후 공사가 계속 지연되고 있어 상기 공문으로 공정관리 강화 및 귀사와 우리시 간의 2차례에 걸친 통합공정회의시(‘15.1.14, 1.29) 특단의 대책을 촉구하였음에도 불구하고,15.1.29자 공사 지연이 더욱 심화(계획 57.38%, 실적 55.54%, 대비 96.78%)되고 있으며 현재와 같이 공사관리가 이루어질 경우 준공예정일에 맞춰 공사완공이 어려울 것이며 이에 따른 시민불편 및 우리시 건설행정 실추가 우려됩니다.

3. 따라서 귀 사와 우리시 간 공기연장 합의 및 실시계획 승인 이후 추가 발생되는 공사지연에 대한 책임은 전적으로 귀사에게 있다는 점을 재차 알려드리며, 본 사안의 심각성을 인지하시어 지연공정이 만회될 수 있도록 귀사에서는 주간사 및 출자자와 함께 공정관리 강화를 위한 특단의 대책을 마련(통합공정회의시 2,10일 까지 마련하는 것으로 협의)하시어 공사가 안전하게 적기 완공될 수 있도록 간곡히 요청합니다.

4. 아울러, 건설보조금(2014년도 예산, 138억원) 집행을 위한 예산 운용계획을 수립코자 하오니‘15.2.28일 현재 기준으로 변경 재원조달계획상의 누적공정률(56.09%, 14.4/4분기) 달성과 기성검사 및 민간자본(자기자본, 타인자본) 조달 이행여부를 15. 2.3(화)까지 기한지켜 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정영호		경전철1과장	박동룡		도시철도사업부장	02/02 이은상
협조자	주무관	위성환		주무관	임병길		주무관	임병관
주무관	안창호		경전철2과장	최광무
시행	도시철도사업부-910	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 9층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7180	/전송	02-772-7305	/		/	대시민공개