문서번호	토목부-2008
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목총괄과장	토목부장		시설국장
오열상	서관석	노우성		02/03 형태경
협 조
	도시고속도로과장		홍숭희
	토목설계과장		이승우
	교량건설과장		이동훈
	터널건설과장		권혁대
	광역도로과장		진재섭

공사현장별 현안사항 보고회 개최 결과보고

도시기반시설본부

(토목부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

공사현장별 현안사항 보고회 개최결과 보고

‘15. 1.29(목) 실시한 공사현장별 현안사항 보고회 개최결과 및 시설국장   요청 사항에 대한 조치계획을 보고하는 사항임.

1	보고개요

○ 일    시 : 2015. 1.29.(목)

○ 장    소 : 시설국장실

○ 보고내용 : 29개 현장 38건(공사현장별 주요 현안사항)

계	토 목 총괄과	광 역 도로과	터 널 건설과	교 량 건설과	토 목 설계과	도시고속 도 로 과
29개 현장 / 38건	3 / 4	6 / 14	7 / 7	7 / 7	4 / 4	2 / 2

2	시설국장 요청사항

연번	사업명	요청사항	소관과
1	장안교(구교) 성능 개선공사	실시 설계 시 지장물 조사가 미흡한 것으로 판단되는 바 적정 대안 마련. 하천내 공사장임을 감안하여 공정계획 수립 - 신교 건설 시 지장물(도시가스관로) 조사여부를 확인하고 참고 자료로 활용.	토목총괄과
2	구리암사대교 건설공사	- 시설물 인수인계 부분은 도로계획과에서 주관하여 추진이 필요하며, 관련자료 등을 적극 협조하여 주기 바람. - 한강시민공원 둔치(구리시)내 관리용 도로 포장에 대하여는 현황 도로 폭 등을 고려하여 면밀히 검토하되 시설물 인수인계 시 문제점을 제기하지 않도록 합의각서 등을 징구 하여 추진하여 주기 바람. - 암사대교 북단 아천IC 구간 시설물 유지 관리는 구리시 소관으로 업무 추진에 만전을 기하여 주기 바람.	광역도로과

3	선사로 ∼ 고덕지구간도로 확장공사	고덕 시영 재건축 조합측과 협의 지연되고 있는 생태육교는 재건축 사용승인과 연계 하여 공사추진 필요.	광역도로과
4	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	- 겸재교 접속도로 방음벽 설치와 관련하여 감사원 감사결과 통보 시 주민설명회 등을 개최하고 형식 결정에 대해 검토 후 시행. - 겸재교를 통과하는 버스노선 결정과 관련하여 ‘15. 4월말 개통 가능토록 업무 추진에 만전을 기하여 주기 바람.	터널건설과
5	동부간선도로 확장공사	- 시장님께 보고한 지하화 보고내용을 숙지하여 업무에 반영 및 추진 철저. 도봉지하차도은 우기전까지 구조물 시공 및 되메우기애 만전을 기하여 주기 바람.	교량건설과
6	천호대로(광나루역)확장공사	- 절토 사면 토압을 감안 PC 옹벽설치 시 구조 검토 실시.	교량건설과
7	서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 및 고척교 확장공사	검문소를 전망대로 활용방안 강구.	교량건설과
8	신사사거리 ~ 고양시계간 도로개설공사	터널상부 주차장 건설시 안전관리를 철저히 하기 바람.	교량건설과
9	도시고속도로 연결램프(화랑로 진출입) 설치 실시설계	- 사업내용 세부적으로 설명 요망.	토목설계과
10	한강상 교량 연결램프 구조 개선(강북지역) 실시설계	- 사업내용 세부적으로 설명 요망.	토목설계과

3	조치계획

○ 요청사항에 대하여 해당 현장별로 조치

- 시공사, 건설사업관리단 등 해당 현장 관계자와 정보공유 및 전파

○ 이행에 장기간 소요되는 사항은 추진 단계별 중간보고(구두보고 등)

붙  임 : 공사현장별 현안사항 1부.  끝.