문서번호	도시철도사업부-967
결재일자	2015.2.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
김상엽		최광무	02/03 이은상
협조
	주무관		임병관

- 우이~신설 도시철도 민간투자사업 -

휴일 및 주중 야간 감리 근무계획 승인 검토 보고

2015. 2.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

휴일 및 주중 야간 감리 근무계획 승인 검토 보고

우이∼신설 도시철도 민간투자사업(1공구)의 감리단 휴일 및 야간 근무계획 승인 신청서에 대한 검토 보고 임.

휴일 및 야간근무 요청내역

○ 관련근거 : 평감(우이) 2015-49호(2015. 2.22.)

○ 휴일 및 야간 근무일자

- 휴일 근무일자 : 2015. 2. 7(토) ~ 2. 8(일)

- 야간 근무일자 : 2015. 2. 9(월) ~ 2. 13(금) 18:00~22:00 (4시간)

휴일 및 야간근무 계획

○ 관련근거

- 입찰안내서 제6장 6.2.3 휴일 및 야간작업 근무요령

- 책임감리 현장참여자 업무지침서 제5조제3항(감리원의 근무수칙)

○ 감리단의 휴일 및 야간작업 승인조건

- 휴일 및 야간작업 시행 2일전 작업세부계획 수립하고 공사 관리의 공백이 발생하지 않도록 근무자 정위치 배치하시기 바랍니다.

- 지하매설물 관련 규정을 숙지하여 이행하고, 안전수칙을 지켜 안전사고가 발생하지 않도록 공사장 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 위험한 작업의 내포 또는 지장물 등의 근접작업으로 유관기관의 입회가 필요할 경우 평일 주간에 시행하시기 바랍니다.

- 휴일 및 야간 작업시 감리원은 1~2인 탄력적으로 근무하되, 감리비는 시공사 부담입니다.(입찰안내서 제6장 6.2 규정에 따라 원인자 부담)

○ 휴일근무 주요내용

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용	비고
2.7(토)	주 간 (감리원 2인)	∘ 차량기지 : 검사고 레일 벽체 거푸집 해체 ∘ L01정거장 : 연결통로 종점부 철근 조립 ∘ 본선2구간 : 16~17SP 벽체 되메우기 ∘ L02정거장 : 기능실 A~2SP 종횡 버팀보 해체 ∘ L03정거장 : 내부 E/V 2단 벽체 방수	*** ***

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용	비고
2.8(일)	주 간 (감리원 1인)	∘ 차량기지 : 교대 날개벽 거푸집 설치 ∘ L01정거장 : 연결통로 2단벽체 및 슬라브철근 조립 ∘ 본선2구간 :12~13SP slab동바리 및 거푸집 설치 ∘ L02정거장 : 기능실 A~2SP 종횡 버팀보 해체 ∘ L03정거장 : 집수정 2단 벽체 철근 조립	***

○ 야간 작업 주요내용

구분	작업구간	작업일시	작업내용	근무자
야간 작업	L01정거장 본선2구간 L02정거장 L03정거장	2015. 2.9(월)~2.13(금) 18:00 ~ 22:00 (4시간)	∘ 현장 정리 정돈 ∘ 철근 조립 및 배근 ∘ 거푸집 설치 ∘ 동바리 설치	감리1명

○ 감리단 야간 근무자 현황

구 분	2.9(월)	2.10(화)	2.11(수)	2.12(목)	2.13(금)	비고
야간작업	위호진	김민수	위호진	김민수	위호진

책임감리원 검토의견

○ 시공사에서 승인 요청한 주중 야간 및 휴일 작업계획은 검토결과 적정하여 승인함이 타당하다고 판단됨

□ 휴일작업에 대한 감리대가는 「전면책임감리용역 입찰안내서」제6장(과업내용서) 제1절 6. 2항에 의거 휴일 근무 원인자인 시공사에서 부담

조치계획

○ 휴일 및 야간작업에 대해 책임감리원의 검토의견과 같이 작업의 연속성과 지연공정 만회에 최선을 다할 수 있도록 다음과 같이 승인코자 함

□ 공사의 안전, 품질, 공정관리를 위해 감리원의 휴일 및 야간 근무계획을 승인하고자 함

□ 감리원의 휴일근무 대가는 시공사 부담으로 함.

붙  임 : 관련 서류 각 1부. 끝.