문서번호	시설관리과-2098
결재일자	2015.2.3.
공개여부	부분공개(6)

주무관	시설관리과장				결재
안규태	02/03 송근호
협 조

급수공사 연기보고(내곡동 374-86, 개량-35)

명에 의거 서초1동외 10개동 상수도공사 담당업무 수행중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 보고 요지 : 급수공사 준공기한 연기

2. 공사 현황

지시번호	공사위치	공사개요	당초공사기간	연기사유	비고
개량-35	내곡동 374-86	D=20mm 분기점 폐쇄	12.26 ~ 2015.1.30	공사현장 장애물 미정리

3. 지체상금 부과여부 : 상기 급수공사 발주청 귀책사유로 인한 급수공사 연기건이므로 지체상금 미부과코자 함.

4. 조치내용 : 상기와 같은 연기사유로 도급업체에서 급수공사 준공기한을 연기 요청함에 따라 공사                기간을 변경 처리코자 합니다.

가. 변경공사기간 :  2014.12.26. ~ 2015.2.28

붙임 : 공사 연기원 1부(별도).  끝.