내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	안전총괄과장
(경유)
제 목	2014 회계연도 세출 사고이월 자료 제출

1. 예산담당관-784(15.1.22)호와 관련입니다.

2.  2014 회계연도 사고이월 자료 및 2013 회계연도 사고이월사업 집행현황자료를 아래와 같이 제출하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 사고이월대상 사업(도시개발특별회계)

(단위: 천원)

단위사업	세부사업	예산액	사고이월 예정액	완공 예정일	이월사유
걷기편한행복거리 만들기 보도유지관리	보도블록 10계명 백서제작	156,000	19,388	‘15.3.31	서울시 보도블록의 역사와 보도블록10계명의 추진과정을 기록으로 남기고 향후 서울시 보도정책의 길잡이로 삼고자 제작중인 백서의 다양한 내용 수록 및 자료의 정확성 확보를 위한 사실확인이 필요하여 이월함
도로시설물 관리	화양동 대학 문화의 거리 조성	250,000	65,720	‘15.6.30	화양동 대학 문화의 거리 조성 타당성조사 및 기본계획용역 추진과업에 대한 문화적인측면 추가 검토와 외부전문가 의견 수렴 등을 위하여 용역 준공기한 연기에 따른 사고이월
계			85,108

붙 임 : 1. 2014회계연도 사고이월요구서 1부.

2. 2014회계연도 이월사업별 명세서 1부.

3. 2013회계연도 사고이월사업 집행현황 1부. 끝.

	보도환경개선과장
주무관	이숙진		보도정책팀장	조재관		보도환경개선과장	02/03 박문희
협조자
시행	보도환경개선과-1491	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-8110	/전송	2133-0764	/		/	대시민공개