문서번호	시설과-669
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		추진반장
최강욱		02/03 유인행
협 조

서울대공원 지하구 소방시설공사(1차)

예비준공검사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2

서울대공원

(기반시설안전추진반)

서울대공원 지하구 소방시설공사(1차)

예비준공검사 시행계획

공사 시행중인 서울대공원 지하구 소방시설공사에 대한 예비준공 검사를 아래와 같이 시행하고자 합니다

Ⅰ		근 거

○ 행정2부시장방침 171호(기술심사담당관-8908, 2013.5.20)

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 서울대공원 지하구 소방시설공사(1차)

○ 공사기간 : 2014.06.26.~2015.02.13.(총차 : 2014.06.26.~2015.04.30.)

○ 계약금액 : 금437,000,000원(총차 : 587,783,000원)

○ 공사업체 : ㈜케이알산업 대표 손정

○ 공사내용 : 지하구 폭 1.5~2.85m, 높이 0.87~2.5m, 연장 9.2km

- 자동화재탐지설비(선형감지기), 유도등, 싸이렌설비 등

⇨ 현공정 : 90%(소방기구 취부 및 케이블 접속 중)

Ⅲ		검사내용

○ 검사일시 : 2015. 02. 05(목)  14:00

○ 검사내용 : 설계도서에 의거 시공적정여부 및 보완이 필요한 사항 등

○ 검사방법 : 공사부서, 유지관리부서, 감리사 합동점검

○ 검 사 자 : 시설과 : 마동훈, 감리사(건창기술단) : 이원영

Ⅳ		행정사항

□ 검사결과 미비사항 및 보완이 필요한 사항이 발견될 경우 문제점 해결후 준공처리

첨부 : 예비준공검사 점검표 1부.