투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	제2처리장 유량조정및침전조 기본.실시설계용역 준공기한 연기안내

우리센터에서 시행중에 있는 “제2처리장 유량조정 및 침전조설치공사 기본및실시설계용역”에 대하여 자문회의결과 반영 및 절대공기 부족으로 인한 준공기한을 연기하고자 하오니 재 계약하여 주시기 바랍니다

가. 계 약 자 : ㈜경보기술단, 녹원종합기술(주)

나. 계약금액 : 69,102,000원

다. 연기기한

- 당 초 : 2014.02.06

- 변 경 : 2015.02.26

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기 방침서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
수신자	(주)경보기술단 대표이사, 녹원종합기술(주) 대표이사,관리과장
주무관	김근수		물재생과장	02/03 강병수
협조자
시행	물재생과-683	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동, 중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2574	/전송	02-2211-2579	/	kksu49@seoul.go.kr	/	대시민공개