문서번호	시설관리과-754
결재일자	2015.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
성기옥		한명석	02/03 강신재
협조

‘14년『노후밸브 정비』추진결과 보고

2015. 2.

상 수 도 사 업 본 부

(시설관리과)

‘14년『노후밸브 정비』추진결과 보고

『노후밸브 정비』사업 관련하여 2014년 정비 추진실적과 수도사업소 경영실적 평가 결과를 보고 드림.

□ 사업개요

❍ 사업내용 : '94년 이전 설치된 회주철 밸브 및 고장밸브 교체·정비

❍ 대    상 : 노후 밸브 79,017개소

❍ 사업기간 : 2008 ~ 2019년

❍ 소요예산 : 601,500백만원

- 연차별 사업비                                    (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2014	2015	2016	2017 이후
계	601,500	102,430	12,000	15,000	18,000	454,070

□ ‘14년 추진현황 및 정비실적

❍ 사 업 비 : 12,000백만원

❍ 대    상 : 노후·고장밸브 1,500개 교체 (가동형 제수밸브 500개 포함)

❍ 정비실적 (세부현황 별첨)

(단위 : 개)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표	1,500 (500)	230 (70)	110 (60)	250 (80)	90 (40)	250 (70)	220 (70)	200 (60)	150 (50)
정비실적	1,666 (500)	230 (70)	139 (60)	276 (80)	120 (40)	254 (70)	239 (70)	216 (60)	192 (50)
정비율(%)	111 (100)	100 (100)	126 (100)	110 (100)	133 (100)	101 (100)	108 (100)	108 (100)	128 (100)

* (  ) 내서는『가동형 제수밸브』

※ 정비실적은『노후밸브 정비』사업 실적이며, 노후 상수도관 정비공사, 급수공사, 누수복구 등을 포함하여 총 3,325개를 정비하였음.

⇒ ‘15. 1. 1. 현재 노후밸브는 41,387개임.

□ 경영실적 평가

❍ 평가항목 : 고장 및 노후밸브 정비 (배점 : 3점)

❍ 평 가 자 : 시설안전부 시설관리과장 등 2명

❍ 평가방법 :『‘14년 경영실적 평가 매뉴얼』기준

- 수도사업소별 “노후밸브 정비” 목표수량 달성률 (달성률, 100% 기준)

▶ 달성률(%) : 연간 실적/연간 목표 × 100

- 가동형 제수밸브, 대구경 정비실적을 가산점으로 추가 부여

구 분	가동형 (80~100㎜)	150㎜ 이하	200 ~300㎜	400 ~600㎜	700 ~900㎜	1,000㎜ 이상
가산점 (점,%)	실적/목표 ×100점	없음	실적×200%	실적×400%	실적×600%	실적×1,000%

❍ 평가 결과 (최우수 - 남부, 우수 - 동부, 북부)

- 1등 사업소를 100점 만점으로 하고 2등부터 순위에 따라 3점씩 차등 부여

구 분	목표 달성률(%)	가산점			계 (가동형+대구경)	순위	평점	표준화 점수 표준화 점수 = 평점 × 평가지표 가중치 (0.03)
		가동형	대구경
			가산비율	가산점 대구경 가산점 = 가산비율 × 0.01점 (목표 달성률이 전 사업소 100%이므로 가산점으로 순위 산정)
중 부	100	100	2,800	28	128	5	88	2.64
서 부	100	100	3,800	38	138	4	91	2.73
동 부	100	100	5,800	58	158	2	97	2.91
북 부	100	100	4,800	48	148	3	94	2.82
강 서	100	100	2,600	26	126	7	82	2.46
남 부	100	100	6,000	60	160	1	100	3.00
강 남	100	100	2,800	28	128	6	85	2.55
강 동	100	100	2,400	24	124	8	79	2.37

□ 2015년 추진계획 : 노후밸브 정비 2,000개

❍ 사업소별 노후밸브 수량을 감안하여 정비대상 배분

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	비고
정비 대상(개소)	2,000	275	220	255	160	305	300	275	210
소요예산 (백만원)	8,000	1,100	880	1,020	640	1,220	1,200	1,100	840

* 시설관리과-441 (‘15. 1. 21.) 기 통보

❍『노후밸브 정비』경영평가 매뉴얼 하반기 재정비 예정

- 노후밸브 정비가 단수, 적수발생 등의 우려로 소구경(80~100㎜) 위주로 정비가 되고 있어 정비 실효성 다소 저감

⇒ 대구경 밸브 교체 제고방안 강구

❍ 매월 노후밸브 교체실적을 수도사업소로부터 보고(제출)

□ 행정사항

□ 경영실적 평가 결과를 경영혁신과 및 수도사업소에 통보 : 본부 시설관리과

□ 2015년 노후밸브 교체실적 월보 제출 : 수도사업소

- 사업소 시설관리과에서 총괄하여 전월 실적을 익월 5일 까지 본부로 제출

붙임 : 1. ‘14년 노후밸브 세부 정비현황 1부.

2. 밸브 현황(GIS 통계, ‘15. 1. 1.) 1부.

3.『노후밸브 정비』월보 서식 1부.  끝.