내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 의뢰

1.물재생계획과-1443(2015.2.2)호와 관련입니다.

2. 우리시에서 수행 중인 「사유지통과 공공하수도 안전성 향상을 위한 정비방안 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 사유지통과 공공하수도 안전성 향상을 위한 정비방안 용역

나. 용역기간

1) 당초 : 2014.7.16.~2015.2.10.

2) 변경 : 2014.7.16.~2015.5.11.

다. 용역비 : 174,620천원(금일억칠천사백육십이만원정)

라. 용역기관 : ㈜동일기술공사

마. 연기사유

- 공공하수도의 사유지 통과 유무에 대한 관로 현장조사, GIS탑재를 위한 현장측량, CCTV조사가 수반되는 용역으로 동절기 잦은 폭설, 한파로 인한 공정차질 및 사유지 통과 공공하수도 민원 사례(66건)와 자치구 추가 발굴 사례(33건)에 대해 검토·분석 등에 소요기간이 필요하여 준공기한을 불가피하게 연기하고자 함

붙 임 : 1. 준공기한 연기 방침 및 연기의뢰서 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

	물재생계획과장
주무관	홍광호		하수관리팀장	최승각		물재생계획과장	02/04 최진석
협조자
시행	물재생계획과-1560	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생계획과	/
전화	02)2133-3784	/전송	02)2133-1042	/	samsamc@seoul.go.kr	/	대시민공개