문서번호	토목부-2197
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
한병찬	진재섭	02/04 노우성

「구리암사대교 건설공사」

국도43호선 진·출입 램프 등 아천IC일대 추진방안 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

(토 목 부)

「구리암사대교 건설공사」

국도43호선 진·출입 램프 등 아천IC일대 추진방안 검토보고

아천IC 일대 국도43호선 진·출입 램프(K,L) 미개통에 따른 민원발생 등  관계기관 협의 의견에 대한 추진방안을 검토보고 드림.

※ 아천IC 개통관련 감리단 검토 보고【암사(감리) ’15-27호(’15.1.16)】

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 규    모 : 폭 24∼44m(4∼6차로) 연장 2.74㎞

교량 1.13㎞, IC 2개소(아천,암사)

○ 총사업비 : 352,176백만원(국비 50% : 시비 50%)

○ 공사기간 : ’06.4.5. ∼’15.6.30.(15차 ’14.12.11.∼’15.6.30)

○ 시 공 사 : 현대건설 ㈜ 대표 정수현

○ 감 리 사 : ㈜ 도화엔지니어링 대표 박승우외 1개사

□ 감리 검토내용

○ 아천 IC, Ramp-K·L 개통 방안 및 국도 43호선 좌회전 진입구간 대기차로 설치 방안

- (Ramp-K·L) 구리경찰서 협의 결과, 엇갈림 발생 구간은 교통안전사고 및 차량 정체가 예상됨에 따라 교통신호 설치는 불가하다는 입장이며, 통로박스 등 입체시설로 설치 요구하고 있고

- (국도43호선) 램프 K구간 진입을 위한 좌회전 대기차로는 현 설계(75m)대로 설치시 출근길 차량 증가로 U-Turn차로 확보 등 차량 분산방안 검토와 국도43호선 좌회전 대기차로는 400m이상 확보가 필요하다는 의견으로

- 국도43호선 좌회전 대기차로 규모 등 아천IC 진출입 램프(K,L구간)에 대하여는 교통영향분석을 통해 처리방안 마련 필요

	< 아천IC 교통영향분석 >
◆ 교통영향분석 비용 : 약 50백만원 ◆ 기간 : 약 2개월 ◆ 내용 : 아천IC 및 국도43호선 접속부 교통영향분석

□ 조치계획

○ 감리단 검토의견에 따라 미개통된 Ramp-K․L구간을 포함한 국도 43호선 좌회전 대기차로 규모, 차량분산 방안(U-Turn) 등 아천IC 일대 교통영향분석을 통해 대책방안을 마련코자 하며.

○ 사업의 시급성을 감안 교통영향분석 기간을 최대한 단축(1.5개월)하여 추진토록하고 이에 소요되는 비용(50백만원)은 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙  임 : 감리단 검토보고 1 부.   끝.