투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	공사 설계변경 시행(3차제3회)

「율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사」에 대하여 아래와 같이 설계 변경(3차제3회)을 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사

2. 공사기간 : 2013.05.02 ~ 2015.02.28.

3. 공 사 비 : 8,649백만원

4. 도 급 자 : 북일종합건설(주)외 2개사

5. 예산과목 : (도시개발특별회계)도시안전본부도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 율곡로창경궁앞도로구조개선, 시설비및부대비,시설비

6. 설계변경내역

○변경내용                                                             (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감	변경사유
공 사 비	8,649,000,000	7,209,000,000	감)1,440,000,000	현장여건에 맞게 변경
도 급 비	8,014,000,000	6,758,000,000	감)1,256,000,000
관급자재비	635,000,000	451,000,000	감)184,000,000

○ 준공기한 : 변경없음

붙 임 : 1)보고서 1부.

2)변경내역서 1부.  끝.

	토목부장
★주무관	박상철		광역도로과장	진재섭		토목부장	02/04 노우성
협조자	경리과장	허금도
시행	토목부-2196	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2559	/전송	02-3708-2599	/	scpark555@seoul.go.kr	/	대시민공개