함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	「경원선 월계-녹천 철도이설공사」 구간내 지장상수도 이설공사 향후 추진공정 송부 및 업무협조 요청

1. 배수과-685호(2015.2.3.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 「경원선 월계-녹천 철도이설공사」 구간내 지장 상수도관 이설(월계배수지 송배수관)에 대한 향후 추진공정 및 일정을 붙임과 같이 송부하오니 공사추진에 만전을 기해주시기 바랍니다.

3. 아울러, 이설공사에 따라 기존 신축관이 신축변형에 취약해지는 점을 감안하여 신설 신축관(또는 밸브접합관) 설치를 공사에 반영, 조치해 주시기 바랍니다.

◈ 월계배수지 송배수관 이설공사 향후 추진일정

- 배수관로(D2200) 수계전환	2.2(월)~2.13(금)

- 시설물 합동 점검(관련부서)	2.13(금)

- 이설관로 담수 및 세척작업	2.12(목)~2.27(금)

- 배수관로(D2200) 연결공사 실증 테스트	2.26(월)~2.27(수)

① 연결공사와 동일시간(24hr) 실제 단수가능 여부 확인을 위해 실증테스트 시행

- 연결공사	3.5(목)~3.9(일)

- 통수추진	3.12(목)~3.17(화)

◈ 협조사항

- 북부수도사업소 : 수계전환 및 실증테스트, 연결공사 간 장시간에 걸쳐 서서히 밸브조절하여 수질사고 예방

- 감리단 및 시공사

① 실증테스트 기간 중 연결공사 사전 연습 실시

② 송배수관로 상 신설 신축관 설치위치 검토 보고(감리단 ⇒ 배수과)

③ 연결공사간 사고예방을 위해 기존 신축관 보강 철저

※ 상세 공사 추진공정 및 일정은 붙임문서 참조

따로붙임 : 경원선 철도 이설공사 향후 추진일정 검토 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	북부수도사업소장,한국철도시설공단이사장,(주)평화엔지니어링,풍림산업(주),신한엔비텍주식회사
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	02/04 이규상
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-725	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개