문서번호	시설보수과-985
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		박병연	02/04 조병준
협조

현장 실정보고 검토 보고

(2014년 개봉고가차도 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

강서도로사업소

(시설보수과)

현장 실정보고 검토 보고

“2014년 개봉고가차도 보수공사” 관련,  감독기관인 시설관리공단의 현장 실정보고서 제출 건에 대하여 검토 및 보고 후 처리하고자 합니다.

▷ 관련문서: 시설보수과-521호(‘15.1.20) “개봉고가 토공부 중앙분리대 뱡호책 설치 검토지시”

- 시설관리공단 공사감독1처-292호, 291호 (‘15.1.12) “공간비계 설치물량 조정”

- 공사감독1처-1010, 1008호 (‘15.1.30) “개봉고가 토공부 중앙분리대 뱡호울타리 설치 검토”

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : “2014년 개봉고가차도 보수공사-강서”

공사기간 : 2014.9.22 ~ 2015.3.20.

공사개요

○ 포장보수공 : 교면 재포장(SMAT-CON공법) 2,156㎡, 토공부 재포장 20a, 보도부(방수) 재포장 10a

○ 콘크리트보수공 : 표면보수 1,671㎡, 단면보수 62㎡, 균열보수 10m

○ 배수시설정비공 : 강관배관 448m, 곡관배관 32개소, 레듀샤 47개소, 교량배수구 관세정 370m, 배수구 구멍뚫기 43개소

○ 기타보수공 : 강재재도장 300㎡, 신축이음덮개판설치 8개소, 중분대하부덮개판설치 239m, 슈청소공 82개소, 케이블보호용덮개보수 72개소

○ 부   대   공 : 공간비계설치 1,725㎡, 보호막(분진·방진망) 설치 1,897㎡, 가설사무실·창고, 트럭크레인(10톤) 480HR 등

도 급 비 : 1,145,350,430원 (관급비 44,163,700원,  관급비 90,186,300원 별도)

계 약 자 : 미래건설기술(주) 대표 염일영

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		현장 실정보고 사항

1

《공간비계 설치 물량 조정》에 관한 건

○ 현황 및 문제점

- 공간비계 설치는 당초 설계상 교면 재포장(SMAT-CON) 워터젯 시공시 하부 낙하물 사고를 방지코자 재포장 면적의 80%를 적용하였으나,

- 남부순환로 횡단구간 외의 공영주차장 구간은 차량통제가 가능하여 공간비계를 제외하여 신속하고 효율적인 공사 추진 필요

○ 검토내용(시설관리공단)

- 현장 확인결과에 따라 공간비계 설치 면적을 조정하여 공사로 인한 시민불편을 최소화하고, 예산절감토록 조치하고자 함

- 공간비계 설치 물량 실측결과

연번	보수공법	당초	변경	증감	비고
1	공간비계 설치	1.724.8㎡	610㎡	감) 1,114.8㎡	남부순환로 횡단구간 외 제외
2	보호막(분진,방진망) 설치	1,897.2㎥	678㎥	감) 1,219.2㎥

- 개략공사비 감소 : 60백만원

《검토의견》

○ 공단 검토내용과 같이 공간비계 설치물량을 조정하는 것이 타당함

2

《토공부 중앙분리대 방호울타리 설치 검토》에 관한 건

○ 현황 및 문제점

- 개봉고가차도 중앙분리대에 방호울타리가 없어 이용 차량 및 시민의 교통안전을 위하여 설치가 필요함

- 교량구간은 상·하행선이 각각의 구조물로 중앙분리대 연석도 분리되어 있어 중앙분리대 방호울타리 설치가 어려우나, 시·종점 토공부에는 설치 가능함

○ 검토내용(시설관리공단)

- 교통사고 사전 예방을 위하여 중앙분리대 시·종점 토공부에 방호울타리를 설치함이 타당하다고 사료됨

- 중앙분리대 방호울타리 설치 물량 실측결과

연번	위치	규격	적용 등급	수량	개략공사비 (천원)	비고
1	개봉고가 (현대아파트 앞)	개방형 (2단, 교량용) - 상단분체 H900 × W3000	SB4	82m	28,600	연석부 (앵커)
2	개봉고가 (개봉사거리 앞)	개방형 (2단) - 상단분체 H900 × W3000	SB4	65m	15,290	성토부 (항타)
소 계				147m

- 개략공사비 : 44백만원 (도급비에 포함 – 사급자재)

《검토의견》

○ 개봉고가차도 시·종점 토공부에 중앙분리대 방호울타리 설치는 타당함

○ 다만, 자재는 조달구매하여 공사비 최소화 필요 : 개략공사비 26백만원

연번	위치	규격	적용 등급	수량	개략공사비 (천원)		비고
1	개봉고가 (현대아파트 앞)	개방형 (2단, 교량용) - 상단분체 H900 × W3000	SB4	82m (27경간)	관급비 (설치도)	16,254	연석부 (앵커)
2	개봉고가 (개봉사거리 앞)	개방형 (2단) - 상단분체 H900 × W3000	SB4	65m (22경간)	관급비 (하차도)	8,556	성토부 (항타)
					시공비: 1,353
3	조달수수료(관급비의 0.54% 적용)				134
소 계				147m (49경간)	26,297

※ 시공비 산출근거 : 2015년 서울시설계지침(Ⅱ) 일위대가 『6. 점검통로 및 난간 - 제33호표』에 낙찰률 적용

(1,353,603원 = 70,925원/경간 × 낙찰율(86.75%) × 22경간)

Ⅲ		처 리 의 견

○ 시설관리공단의 실정보고 사항에 대하여 각 건별 검토의견과 같이 조건부 승인 처리하고,

○ 중앙분리대 방호울타리는 관급으로 조달구매하여 공급하고자 하며,

○ 공사비 변동사항은 추후 설계변경시 반영하여 보수공사 추진에 만전을 기하고자 합니다.

첨부 :  1. 현장 실정보고서 각 1부 (시설관리공단).

2. 중분대용 방호울타리(토공부, 교량용) 비교표 각 1부.  끝.