문서번호	도로시설과-1527
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설기술팀장	도로시설과장
김훈겸		이상호	02/04 이덕기
협조

『두모교 내진성능보강공사 관련』 현안사항 관계자 대책회의(2차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02

도시안전본부

(도로시설과)

『두모교 내진성능보강공사 관련』

공사 현안사항 관계자 대책회의 결과보고

□ 회의 개요 (2차)

❍ 일 시 : 2015. 2. 3(화) 10:00 ∼ 11:30

❍ 장 소 : 서울시청 도로시설과 회의실(서소문별관 1동 2층)

❍ 참 석 : 총 10명

-  市(3)  : 도로시설과장, 시설기술팀장, 김훈겸

- 공단(3) : 도로시설처장, 구조물3팀장, 업무담당 곽성환

- 공사관계자(4) : 설계사(1), 시공사(2), 감리사(1)

❍ 주요 회의안건

- 공사 현안사항 관계자 긴급 연석회의 1차(1. 29) 논의사항에 대한

각 사의 최종의견 제시 및 향후 대책 토의

▸ 시공사에서 재조사 통보한 55개소 중 12개소에 대한 재시공 인정 여부

▸ 추가 공사시행에 따른 각 회사별 책임있는 대안 제시 등

□ 회의 결과

❍ 본 회의는 지난 1차 회의결과 논의된 사항을 중심으로 준공기한 및

예산회계 연도폐쇄(2. 28) 시점에서 본 공사를 원만하게 완료할 수 있

는 해결방안을 각 사가 합심해서 마련하기 위한 회의이므로 각 회사         의 명확한 의견을 제시해 주시기 바람(도로시설과장)

❍ 그럼, 금번 회의 진행도 시간적 여유가 없는 상황에서 원만한 진행을         위해 각 사별로 질의 응답하면서 의견을 듣도록 하겠습니다.

문1) 감리단은 재시공 및 현장 재조사 대상인 55개소에 대한 조사         결과 중 12개소만 재시공이 요구된다는 시공사의 요청사항에 대해         인정하고 준공기한 내 완료되면 준공처리가 가능한가요 ?

답) 전문기관에서 이에 대한 타당한 의견을 제시해 주시면 그 근거로         준공처리가 가능하다 판단됩니다.(감리사)

※ 감리단이 12개소에 대한 적정여부를 기술적으로 판단 처리해야 할 주체            임을 재강조 하였음

문2) 시공사는 12개소에 대한 재시공을 준공기한인 2.6까지 완료할 수 있는가 ?

답) 현재 12개소에 대해서는 최대한 조속히 재시공 작업중에 있으나,         준공기한(2.6일)내 완료하기에는 절대공기가 부족하여 완료하기가 현         실적으로 어려운 실정임(시공사)

※ 그와 관련하여 준공대비 현장조사 및 행정절차 이행에 필요한 공기               연장 방안을 결정 공단에 통보할 것임

문3) 설계사는 미교체 받침 추가 교체에 따른 추가 실시설계에 대해         적극 협조하여 줄 수 있는가?

답) 최대한 본 설계와 연계된 미교체 받침 추가교체사항에 대한 설계는         설계사의 전적인 부담으로 추가설계를 하도록 하겠음.(설계사)

문4) 감리사는 추가 공사부분에 대해 적극 협조할 수 있는가 ?

답) 본 감리용역이 연장되는 부분은 추가 감리비 없이 수행하겠음.

단, 추가 계약사항에 대해서는 감리용역사는 실행가로 감리를 수행할

수는 있으나, 세부적인 소요예산은 감리기간, 공사비 등을 고려 최종

최종 판단할 수 있을 것으로 판단됨(감리사)

※  감리용역은 인건비로 구성되어 있어 감리사의 용역 계약금액 조정이           어려운 입장을 충분히 동감하므로 추후 의견 조율함이 좋겠음.

문5) 시공사는 추가 공사에 대해 적극 협조할 수 있는가 ?

답) 최대한 협조하겠다는 입장 취지에는 변함이 없음.

단, 본 공사의 계약단가가 실행가 대비 약 97%로 시공사의 추가적인

비용 감수는 어려운 상황이나 최대한 시공사의 이윤을 고려하지 않은

최소한의 실행가로 공사를 수행하도록 하겠음. (시공사)

문6) 마지막으로 각 사에는 추가로 의견을 제시 논의할 내용이 있는가 ?

답) 시공사에서 지난번 업무조정회의 안건으로 상정한 용역비 43,106         천원 감액 조치에 대한 조정을 다시금 검토 요망

용역비 43,106천원의 감액 조치는 사전 시공사와 의견 조율도 없이

서부도로사업소에서 실정보고 회신 통보(12. 30)한 사항으로 시공사

입장에서는 수용하기가 어려운 실정임.(시공사)

※ 본 사안에 대하여 업무조정회의 안건으로 상정 처리하지 말고, 시공사           의 명확한 의견을 감리단에 제시하면 감리단과 공단이 검토하여 최종            조정하는 방안이 타당할 것임

본 긴급점검 용역비 43,106천원의 감액 조치사항에 대한 의견조정이         되어야 정산설계변경을 완료하여 감리단에 정산설계변경을 준공기한          내에 제출 할 수 있음.(시공사)

□ 조치계획

❍ 회의 시 논의된 내용 정리

❍ 빠른 시일내 전문가 자문회의 개최(‘15. 2월초 예정)

- 설계사, 시공사, 감리단에는 자문회의 자료준비 등 협조 요청. 끝.