문서번호	정수과-543
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		이태일	02/04 권오식
협 조
	주무관			윤현진
	주무관			경규선

구의취수장 폐쇄에 따른

예산절감 및 사고예방 업무추진 결과

2015. 02.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의취수장 폐쇄에 따른

예산절감 및 사고예방 업무추진 결과

❍ 구의정수센터 취수원을 강북취수장으로 변경함에 따라 2014.9.30.

구의취수장이 폐쇄됨.

❍ 구의취수장 폐쇄에 따른 철거대상 물품의 재활용 등 예산절감 및

사고예방 업무추진 결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		추진배경 및 관련 근거

□ 추진배경 및 문제점

❍ 구의취수장 취수원을 강북취수장으로 변경함에 따라 ‘14.9.30. 구의취수장 폐쇄로 345종 739개의 설비 및 물품이 철거됨

❍ 이에 따라 정상 사용중이던 염소 투입설비 등의 사용이 불필요해지고, 재활용 가능한 물품도 폐기처분 대상에 포함됨

※ 특히 염소가스 설비는 유독성과 부식성 때문에 담당자들이 물품 관리전환을 받지 않으려는 특징이 있음

❍ 또한 구의취수장 전기폐전 후에는 염소용기 반출을 할 수 없어 사전 업무협의 및 신속 관리전환으로 업무편의성을 확보하고자 하였음

□ 관련 근거

❍ 구의취수장 공간 재활용 및 리모델링 (가)서울거리예술창작센터 조성 및 운영 기본계획(문화정책과-10774호, ‘13.8.19)

❍ 서울거리 예술창작센터 조성부지 재산이관 계획 송부

(문화정책과-11286호, ‘14.9.16)

❍ 구의취수장 폐쇄에 따른 부속설비 및 물품 등 처리계획

(정수시설과-2227호, ‘14.9.25)

❍ 거리예술창작센터 조성에 따른 구의취수장 폐쇄 계획

(상수도사업본부 방침-10675호, ‘14.9.26)

❍ 구의취수장 폐쇄에 따른 예산절감 방안(정수과-3361호, ‘14.9.29)

Ⅱ		애로사항 극복과정

서울시 각 정수센터 및 물 재생센터 담당자들에게 취수장 설비의 정확한 진단결과 및 유지관리 상황을 충분히 설명하고 재활용토록 지속적 업무협의 추진

□ ‘14.4 : 시설물 이관대상 물품목록 작성 및 제출

□ ‘14.5~6 : 구의취수장 폐쇄시 폐기대상 물품의 최소화 방안검토

□ ‘14.7 : 재활용 사용가능 물품선정을 위한 설비진단 합동점검 및 목록작성

❍ 설비진단 합동점검자 : 정수과장, 이정원(기계팀장), 경규선연구사(수질계측기 담당), 조평대(염소설비 담당업무 총괄), 김대용(취수장 염소설비 담당)

□ ‘14.8~9 : 서울시 각 정수센터와 물재생센터 담당자들에게 현황 설명 및 지속적 업무협의로 활용 물품관리전환 대상 확정

□ ‘14.9.22 : 원수 수질자동측정기(시안, NH3-N) 관리전환 요청

(강북정수센터 원수관리과)

□ ‘14.9.25 : 염소용기 관리전환 요청(뚝도정수센터 정수과)

□ ‘14.9.29 : 클로로포름-a 측정기 관리전환 요청(영등포정수센터 정수과)

□ ‘15.1.5 : 총유기탄소측정기 설치완료 보고(구의정수센터 정수과)

Ⅲ		추진 결과

□ 추진 효과

❍ 폐기대상 물품의 재활용을 위한 선제적 상생협력 업무추진을 통해 총 257,752천원의 예산절감

❍ 정상 상태의 물품 재활용으로 유독성 고압가스설비의 적기 예방정비를 통한 안전사고 예방 및 원활한 액체염소 수급관리

❍ 수질자동측정기 재활용으로 수질측정 신뢰도 및 공정관리 효율 향상

□ 예산절감 산출내역

번 호	품 명	규 격	수량	제작 년도	예산절감액 (천원)	관리전환사용부서
1	클로로필-a측정기	0~200mg/L	1 대	2006	36,021	영등포 정수센터
2	염소용기	1톤 800ℓ	20병	2008	75,340	뚝 도 정수센터
3	염소용기	1톤 800ℓ	10병	2009	38,500
4	시안측정기	0~26mg/L	1 대	2008	24,000	강 북 정수센터
5	NH3-N측정기	0~1700mg/L	1 대	2004	22,000
6	온 풍 기	18kw/hr	1 대	2007	1,254	구 의 정수센터
	염소 투입기	56kg/hr	1 대	2006	2,323
			1 대	2006	2,323
	염소용기	1톤	10개	2004	29,350
	총유기탄소측정기(TOC)	0~10ppm	1 대	2006	26,641
합 계					257,752

※ 첨부 1. 구의취수장 폐쇄에 따른 예산절감 방안 1부.

2. 총유기탄소측정기(TOC) 재활용 설치완료 보고서 1부.

3. 기타 관련공문 사본 각 1부.  끝.