문서번호	도로보수과-1082
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		이규철	02/05 임대성
협조
	주무관		이상하

도로옹벽 정밀점검용역 시행 계획

(용산동2가 녹사평대로)

2015.  02. 05(목)

서부도로사업소

(도로보수과)

도로옹벽 정밀점검용역 시행 계획

(용산동2가 녹사평대로)

녹사평대로에 소재한 도로옹벽에 대하여 정밀점검을 위한 용역을 시행하고자함.

□ 시설물 현황

○ 시설물 개요

- 위    치 : 용산구 용산동2가 남산3호터널 남측(녹사평대로)

- 설치시기 : 1978년(남산3호터널 및 반포로 확장공사시)

- 규    모 : 높이 1.5 ~ 8.2m(지상노출부), 연장 394m

- 구조형식 : 철근콘크리트구조(L형 옹벽)

▸옹벽 상단에 투명 방음벽 설치(높이 2.0m)

-  □시설물의 안전관리에 관한 특별법□상 2종 시설물에 해당됨.

▸지면으로부터 노출된 높이가 5.0m 이상 연장이 172m임

※ 2종 시설물 기준 : 높이 5m 이상인 연장이 100m 이상일때

□ 추진경위

○ 2008.01.    : 시설물 인수(용산구 → 서부도로사업소)

※ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 개정

○ 2012.12.10 : 정밀점검 및 도면복원 용역 착수

○ 2013.06.07 : 정밀점검 및 도면복원 용역 완료

○ 2014.07.14 : 상반기 정기점검 시행(도로보수과-6461)

○ 2014.11.28 : 하반기 정기점검 시행(도로보수과-10683)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 도로옹벽(용산동2가) 정밀점검 용역

○ 용역목적

- 정밀점검 등을 통하여 내재되어 있는 위험요인을 조사하여 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 공공의 안전을 확보.

- 향후 시설물설계 및 공사 등 사업진행에 반영

○ 시설물 현황

구 분	구조형식	연 장	높이	준공년	비 고
옹벽	L형콘크리트	394m	1.5 ~ 8.2m	1978(추정)	2종

위 치 도	전 경 사 진
옹벽 394m

○ 주요 과업내용

- 기초자료(설계도서, 점검, 계측 및 보수자료) 수집 및 분석

- 현장조사 및 시험, 상태평가 및 종합평가, 보고서 작성

- 보수․보강 및 유지관리 방안 제시

- 안전점검 편람 재정비 및 주요결함 일상점검매뉴얼 작성

○ 용역기간 : 착수일로부터 70일간

○ 필요예산 : 금15,566천원

- 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물 관리, 도로 및 도로부속물 관리, 도로사면 붕괴예방을 위한 보수.보강, 시설비(401-01)

○ 계약방법 : 수의계약

- 법적 근거 : 지방자치단체계약법 시행령 제25조5항 및 제30조1항에 의거 용역금액이 2,000만원 미만으로 1인 견적가에 의해 수의계약

- 수의계약 사유 : 용산2가동 도로옹벽에 기설치된 방음벽교체공사 계획이 있어 용역수행 후 그 결과에 따라 방음벽 교체공사를 위한 실시설계 용역 및 교체공사를 시행예정이므로 긴급히 용역을 완료하여야 하는 실정임.

□ 추진일정

○ 기술용역 타당성 심사의뢰     : 2015. 2. 5

○ 정밀점검용역 계약의뢰        : 2015. 2. 20

○ 용역 착수 및 시행 (70일)    : 2015. 3월 ~ 4월

○ 용역완료 및 성과품 납품      : 2015. 5월말

붙 임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 용역비 산출내역서 1부. 끝.