문서번호	토목부-2310
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
강철규		권혁대	02/05 노우성
협조

“용비교~행당중간 도로개설공사”

실시공 물량과 강재손료 등 지급 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

(토  목  부)

실시공 물량과 강재손료 등 지급 검토보고

【 용비교 ~ 행당중간 도로개설 공사 】

가설 교량을 실시공 물량과 수방기간동안 상부 철거 및 재설치한 물량을 실시공 물량으로 정하고, 공사기간 연장(2년)에 따른 강재손료(실비 산정) 지급방안에 대해 검토 보고드림

관련근거

○ PH15-용행감-012호(2015. 2. 2.) : 실정보고 승인요청

(가설교량 정산)

공사개요

○ 공 사 명 : 용비교 ~ 행당중간 도로개설공사

○ 공사위치 : 성동구 금호4가동 ~ 성수1동 구간

○ 공사규모 : 도로(용비교) 확장 및 도로개설

- 확장폭 : 5.2m(왕복 4차로 → 6차로), 연장 719m

- 가교   : 폭 10.8m, 연장 160m

○ 공사기간 : 2007. 3. ~ 2015.12.

○ 도 급 비 : 26,477백만원

○ 시 공 사 : 한신공영(주)

○ 감 리 사 : ㈜평화엔지니어링, ㈜선진엔지니어링

감리단 검토내용

○ 가설교량을 현장여건에 맞게 연장을 축소(4m) 설치로 수량 정산

○ 수방기간동안 가교 상부공 철거 및 재설치를 실시공물량으로 정산

- 전체 1회 철거 후 재설치 → 일부만 철거 후 재설치

○ 조달청 질의회신에 따라 공사기간 연장에 따른 강재손료를 실비 범위내에서 지급 반영과 가설교량 설치 및 해체는 현지여건에 맞추어 정산함이 타당함.

- 현황도면

구 분	당 초(전체 철거 및 재설치)	변 경(부분 철거 및 재 설치)	비고
평면도	상부 철거 후 재설치(2Span)
단면도

기타수량정산	- 강재운반(제철소-공장) : 507ton - 토류판설치 후 철거 : 9㎡ - 톤마대쌓기 후 헐기 : 40㎡	- 강재운반(제철소-공장) : 222ton - 토류판설치 후 철거 : 51㎡ - 톤마대쌓기 후 헐기 : 115㎡
강재손료	- 형강 및 복공판 : 1년이상 70% 손료 적용 - 강판 : 100%적용(고재처리)	- 형강 : 설계조사가 100%(신재) - 고재대(감) - 복공판 : 설계조사가 78.5%(구재) - 고재대(감) - 강판 : 100%적용(고재처리)

- 개략공사비

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
가. 실시공 수량정산	3,575,000	3,232,813	-342,187
나. 강재추가손료	-	201,187	201,187
공사비 계	3,575,000	3,434,000	-141,000

조치의견

○ 상기 감리의견과 같이 가교 연장축소, 수방기간 상부공 철거 및 재 설치한 수량으로 정산함이 타당하다고 판단되므로 추후 설계변경시 반영코자 하며,

○ 공사기간 연장에 따른 강재손료(실비산정)는 설계변경 자문회의(소위원회)에 상정, 그 결과에 따라 정산하여 비용을 지급코자 함.

붙 임 : 감리의견서 사본 1부.  끝.