문서번호	시설보수과-994
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영원		정재현	02/05 이승진
협조

준공기한 연기 검토 보고

(창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사)

2015. 2

북부도로사업소

시설보수과

준공기한 연기 검토 보고

(창동지하차도 장애인이동 편의시설 설치공사)

우리사업소에서 시행중인 『창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사』에 대하여 계약상대자로부터  준공기한 연기 신청이 접수되어 이에 대한 검

토 보고임.

관련근거 : 시설보수과 –9127(2014.12.22.)호 소장방침

- 동절기 공사중지 및 교통소통용역 시행 -

공사개요

○ 공 사 명 : 창동지하차도 장애인 이동 편의시설공사

○ 공사개요 : 엘리베이터 설치 2개소

○ 공사기간 : 2014년 11월 26일 ~ 2015년 2월 28일

○ 공사금액 : 747,258,700원

○ 계 약 자 : 주식회사 고황  김미숙

보고내용

○ 계약상대자로부터 공사기간 연기 요청(2015. 2. 4)

- 준공기한 연기사유

· 동절기 공사중지 명령에 의한 공사기간 지연

· 교통소통대책 용역시행을 위한 기간 및 동절기 굴착통제에 의한

지장물 이설 지연(한전)

○ 준공기한 연기요청

- 당 초 : 2014. 11. 26 ~ 2015. 2. 28

- 변 경 : 2014. 11. 26 ~ 2015. 6. 30

검토내용

○ 상기 보고와 같이 준공기한 연기사유가 타당하므로 준공기한을 연기코자 함.

○ 준공기한 연기

- 당 초 : 2014. 11. 26 ~ 2015. 2. 28

- 변 경 : 2014. 11. 26 ~ 2015. 6. 30

○ 연기귀책사유 : 서울특별시(북부도로사업소)

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 :  준공기한 연기신청서 1부.  끝.