문서번호	도로보수과-1173
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김동민		김권일	02/05 조병준
협조

설계변경 검토 보고(제3회)

[2014년 노면표시 유지보수 공사]

2015. 2

강서도로사업소

도로보수과

설계변경(3회) 검토 보고

공사 시행중 당초 계약물량과 작업지시에 의한 작업완료물량과 준공시까지의 규제심의 물량 및 재도색 민원을 감안하여 설계변경을 시행코자 보고드림

공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)-강서

○ 공사기간 : 2014. 04. 11. ~ 2015. 02. 28.

○ 공사개요 : 차선도색 167,520m, 차선제거 7,100m, 표지병설치 100개 등

○ 도 급 액 : 317,504,000원

○ 도 급 자 : 해성실업(주) 이범용

관련근거

○ 제1차 ~ 제9차 작업완료 보고서 : ㈜영호이엔씨(공사 감리)

설계변경 사유

○ 노면표시 (재)도색에 대한 당초계약 물량과 현재까지 작업완료(제9차) 물량 및 작업지시

미완료 물량(제10차) 반영

- 제1차 ~ 제9차 작업완료보고서 : (주)영호이엔씨

주요 물량 변경 내역(안)

공 종	규 격	단위	계약물량	변경물량	비 고
고성능융착식 (수동식)	백색, 문자기호, 15Cm	m	6,000	7,246	증) 1,246
고성능융착식 (수동식),재도색	백색,문자기호, 15Cm	m	29,900	28,718	감) 1,182
고성눙융착식 (수동식),재도색	백색,횡단 보도,15Cm	m	59,000	56,513	감) 2,487
고성눙융착식 (수동식),재도색	백색 실선, 15Cm	m	9,500	11,200	증) 1,700
차선제거(건식흡입)	제거, 15Cm	m	7,100	9,053	증) 1,953
융착식 (수동식)사급,재도색	황색 파선, 15Cm	m	7,800	6,965	감) 835

설계 변경 내역(안)

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고(증·감)
		당 초	변 경
총 공 사 비		568,203,020	569,452,310	증 1,249,290
도급비	공 급 가 액	288,640,000	288,640,000	-
	부가가치세	28,864,000	28,864,000	-
	계	317,504,000	317,504,000	-
관급자재비		250,699,020	251,948,310	증 1,249,290

조치의견

○ 상기와 같이 설계변경하여 공사시행에 만전을 기하고자합니다.

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.  끝.