문서번호	기획관리과-1112
결재일자	2015.2.5.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김운기		이강옥	02/05 이계헌
협조

IT교육과 및 회의실 개선공사 내역변경 보고

2015. 2.

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

IT교육과 및 회의실 개선공사 내역변경 보고

현재 공사 진행 중인 『데이터센터 IT교육과 및 휴게실 개선공사』와 관련하여 일부 시공상의 문제점 개선 등 설계변경 사항이 수반되어 공사 내역변경을 하고자 함.

공사개요

공 사 명 : 데이터센터 IT교육과 및 휴게실 개선공사

공사규모 : 지상 4층 215.94㎡ (구 IT교육과 137.74㎡, 휴게실 55.75㎡)

공사기간 : 2015. 1. 13. ~ 2. 6

공사금액 : 81,280천원 (1,388천원/3.3㎡)

시 공 자 : 에스유디자인(주) 대표 : 김길호

추진경위

2014. 11. 28 IT교육과 및 휴게실 개선·보수 계획 수립

2014. 12. 01 설계용역 시행

2014. 12. 12 설계용역 준공

2014. 12. 19 입찰공고

- 공고기간 : 2014. 12. 19 ~ 26 (7일간)

2014. 12. 30 업체선정 및 공사계약

2015.  1. 13 착공신고

공사내역 변경 : 세부 공종별 내역 따로 붙임

변경사유

- 평면계획 일부 변경 (여직원 휴게실 축소 및 미팅룸 이전)

- 스프링클러 헤드 신설(이설, 연장) 등 일부 공종의 시공방법 인력투입 조정

변경내용

(단위 : 원)

구분		변경 내용	공사비 증감액	내역변경 사유	비고
위치	실명
휴게실	미팅룸(1)	선반(1100*400*50)설치 제외	△88,704	계획 변경으로 미설치	여직원 휴게실 축소 및 미팅룸 위치 변경
		선반( 500*400*50)설치 제외	△43,084
		창호 브라인드 설치(1,800*1000)	77,551	환경개선
	미팅룸(2)	선반(2100*400*50)설치 제외	△153,964	계획 변경으로 미설치
		창호 브라인드 설치(1,800*1000)	77,551	환경개선
	탕비실	하부장(2000*400)	100,000	환경개선
	여직원 휴게실(룸3)	스코트 소파(1인용) 설치 제외	△316,166	계획 변경으로 미설치
		스코트 소파(3인용) 설치 제외	△480,902
		원목공간박스 설치 제외	△196,416
		창호 브라인드 설치(1800*1000)	77,551	환경개선
	여직원 휴게실 (수면실)	창호 브라인드 설치(2500*1000)	107,710	환경개선
	쉼터	스프링클러 헤드(신설, 이설) 9EA	249,300	소방법상 맞춰 추가	신설 : 6 EA 이전 : 3 EA
		스프링클러 가지배관 연장 2EA	20,000
		등박스 루바설치	868,229	환경개선
회의실		블라인드 → 커튼	-	햇빛 차단효과 개선
복도		실명사인(250*250)	△592,416	계획 변경으로 미설치

※ 상기 금액은 제경비 이윤 등이 미포함된 금액임

※ 신설되는 등기구 박스에 간섭되는 에어컨 실외기 3대 이설  : 에어컨 A/S 전문업체 의뢰 별도조치.

계약금액 및 공사기간 : 변동 없음

조치사항

계약금액 범위 안에서 변경계약 및 공사시행

따로붙임 : 1. 합의각서 1부.

2. 수정 설계도면 및 변경내역서 각 1부.  끝.