문서번호	토목부-2315
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박웅교		홍숭희	02/05 노우성
협조

사토장 위치 변경 검토보고

【도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

(토 목 부)

사토장 위치 변경 검토보고

【도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사】

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사』의 사토장 위치 변경 실정보고에 대한 검토 보고임.

1		공사개요

○ 위    치 : 성북구 정릉동 국민대앞

○ 규    모 : 폭 5～6m, 연장 533m

- 신설램프 : 연장 120m(폭 6.24m), 본선확장 : 연장 82m(폭 5.095m)

- 보도 Box : 연장 31m(폭 6.24m), U-Type : 연장 37m(6.24m)

○ 공사기간 : ‘13.12.30.～’16.12.29.

○ 도 급 비 : 8,992백만원(1차 : 3,009백만원)

○ 감 리 사 : 극동엔지니어링(주) 외 1

○ 시 공 사 : 풍림산업㈜ 외 1

2		관련근거

○ 2015. 2. 4. : 사토장 위치 변경 승인 요청(극감정릉 제15 - 22호)

3		실정보고 내용

○ 당초 사토장인 경의선(용산～문산) 복선전철 제1공구 노반신설공사 현장이 2014년 공사가 준공됨에 따라 사토반출이 불가한 실정으로,

○ 당초 설계운반거리와 근접한 현장으로 사토장 위치를 변경하고자 함.

- 사토장 위치 변경

구 분	당 초	변 경
공사명	경의선(용산~문산) 복선전철 제1공구 노반신설공사	고양삼송A4 BL 아파트건설공사
주소	마포구 신수동 93-35	경기도 고양시 덕양구 신월동79-1
반출량(㎥)	7,515㎥	5,000㎥
수용예정일	2013.10.10~2014.10.10	2015.1~2015.12
현장거리(km)	14.0km	15.3km
시공업체	현대건설(주)	풍림건설(주)
처리계획	토사,리핑,발파	토사,리핑,발파

4		감리단 검토의견

○ 당초 설계시 지정된 사토장이 공사준공으로 인해 사토반출이 불가하여 인접장소인 고양삼송아파트 신축현장으로 사토장 위치변경은 타당함

○ 운반거리는 당초 설계보다 2.3km 증가되나 시공사에서 설계변경 증액없이 자부담처리키로 하였음

○ 우선 고양삼송아파트 신축현장으로 토사반출(5,000㎥)하고 잔량(2,515㎥)은 추후 사토장을 재조사하여 보고후 반출할 예정임

- 설계에 반영된 사토장 현황(사토량 15,030㎥)

구 분	1 안	2 안
공 사 명	경의선(용산~문산) 복선전철 제1공구 노반신설공사	수도권매립지
주 소	마포구 신수동 93-35	인천 서구 검안 경서동
수용량(㎥)	75,000	67,000,000
수용예정일	2013.10.10~2014.10.10	2000.10~2015.02(예정)
현장거리(km)	14.0km	39.8km
수용조건	되메우기용	매립용
발주기관	코레일공항철도(주)	수도권 매립지 관리공사
시공업체	현대건설(주)	-
처리계획	토사,리핑,발파	토사,리핑,발파
적 용	◎ (50%)	◎ (50%)

- 사토장 위치변경에 따른 운반거리 및 단가 검토

구분		당 초		변 경		비 고
위 치		경의선복선전철1공구		고양삼송아파트신축현장
사 토 수 량		7,515㎥	5,000㎥	5,000㎥		(잔량)2,515㎥
운 반 거 리		14.0km		15.3km		(증)1.3km
운반 단가	토 사	4,315	5,431원	4,315	5,607원	(증)176원
	리핑암	270	7,448원	270	7,657원	(증)209원
	발파암	375	9,840원	375	10,362원	(증)522원

- 공사비 증․감 대비표                                    (단위 : 천원)

구 분	당 초(경의선)	변 경(고양삼송아파트)	증 ․ 감
사토장 위치변경	43,050	44,150	1,100

※증액된 공사비(1,100천원)는 시공사 부담으로 처리

5		검토 및 조치의견

○ 당초 사토장으로 지정된 현장이 공사준공으로 인해 사토반출이 불가함에 따라 사토장 위치 변경이 불가피한 사항으로 판단되므로,

○ 감리단 보고내용과 같이 사업의 원활한 시행을 위해 고양삼송아파트 신축현장으로 사토장 위치를 변경하여 반출(5,000㎥)하고, 잔량(2,515㎥)에 대해서는 인근 사토장을 재조사하여 추후 변경하고자 함.

붙  임 : 감리단 검토의견서 및 관련 서류 각  1부.  끝.