투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경심의 (소)위원회 자문 의뢰(강남순환 4공구)

우리부에서 시행 중인 『강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사』에 대한 설계변경(소)위원회 자문을 아래와 같이 요청코자 합니다.

1. 공사개요

가. 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사

나. 규    모 : 폭 왕복 4∼8차로, 연장 : 2.48km

다. 공사기간 : 2001.12.29. ~ 2016. 5.19.

라. 시 공 사 : 글로웨이(주)

마. 감 리 사 : ㈜서영엔지니어링

2. 설계변경소위원회 자문요청 내용

연번	자문안건	증·감액	비고
1	교량구간 방호벽 및 LMC포장 물빼기공 변경	감 765,000천원
2	본선교(A2) 가시설 및 가설방음벽 설치	증 38,100천원
3	자동차전용도로 및 교량하부 메스휀스 설치	증 227,000천원

붙임 : 설계변경 소위원회 자문 요청서  3부.  끝.

주무관	박웅교		도시고속도로과장	홍숭희		토목부장	02/05 노우성
협조자	주무관	시희식
시행	토목부-2320	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8664	/전송	3708-2599	/	pkyo2425@seoul.go.kr	/	대시민공개