문서번호	토목부-2322
결재일자	2015.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
강철규		권혁대	02/05 노우성
협조

“용비교~행당중간 도로개설공사”

실시공 물량으로 정산 시행 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

(토  목  부)

실시공 물량으로 정산 시행 검토보고

【 용비교 ~ 행당중간 도로개설 공사 】

용비교(확장)의 기초(강관파일말뚝, 현장타설말뚝)와 흙막이가시설 물량을 실시공 물량으로 정산한 사항에 대하여 검토 보고드림

관련근거

○ PH15-용행감-013호(2015. 2. 2.) : 실정보고 승인요청

(말뚝공사 정산)

○ PH15-용행감-016호(2015. 2. 4.) : 실정보고 승인요청

(흙막이가시설 정산)

공사개요

○ 공 사 명 : 용비교 ~ 행당중간 도로개설공사

○ 공사위치 : 성동구 금호4가동 ~ 성수1동 구간

○ 공사규모 : 도로(용비교) 확장 및 도로개설

- 확장폭 : 5.2m(왕복 4차로 → 6차로), 연장 719m

- 기초공사 : 강관파일말뚝 1,230m, 현장타설말뚝 588m

○ 공사기간 : 2007. 3. ~ 2015.12.

○ 도 급 비 : 26,477백만원

○ 시 공 사 : 한신공영(주)

○ 감 리 사 : ㈜평화엔지니어링, ㈜선진엔지니어링

감리의견

1. 실제 시공한 기초공사(강관파일 말뚝 등) 물량으로 정산함이 타당함.

- 강관파일말뚝 : 46본 1,230m  → 41본 1,171m

- 현장타설말뚝 : 42본  588m   →  42본  617m

- 강관파일 수량과 단가산출시 자재할증(5%) 이중계상 부분 제외, 기존 단가의 수량만 조정하여 협의율(82.54%) 적용

2. 실제 시공한 흙막이가시설 물량으로 정산함이 타당함.

- A1 : 용비교 하부 진입로 이용이 곤란 최소한의 가시설로 변경 시공

- P8 : 시공성 향상을 위하여 공법 변경(어스앵커 → 버팀보)

- A2 : 안정성 확보를 위해 공법 변경(사보강재 → 어스앵커)

※ 어스앵커부 보강(외띠장 → 쌍띠장)

[기초(말뚝) 현황도면]

구 분	당 초	변 경	비고
강관파일말뚝 평면도	H=7.0m(L=6.7m), H=9.0m(7.0m)	H=7.0m(L=13.7m)
현장타설말뚝 단면 및 평면도

[흙막이가시설 현황도면]

구분	당 초	변 경	비고
A1
	-.용비교 하부진입로 이용이 곤란하여 최소한의 가시설로 변경 시공
P8
	-.시공성 향상을 위하여 어스앵커를 버팀보로 변경시공
A2
	- 신설옹벽 강관말뚝 시공이 가능하도록 사보강재를 삭제하고 어스앵커를 반영하여 안정성 확보 - 가시설위치가 기존도로와 매우 근접한 구간으로 가시설의 안정성 확보를 위하여 어스앵커부 외띠장을 쌍띠장으로 변경시공

- 개략공사비

① 기초(말뚝) 공사

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
가. 사토운반	-	8,372	8,372
나. 강관파일말뚝공사	183,516	183,911	395
나. 현장타설말뚝공사	709,153	688,957	-20,196
순공사비	892,669	881,240	-11,429
제 잡 비	224,258	221,168	-3,090
물가변동비	130,732	126,876	-3,856
도급공사비	1,247,659	1,229,284	-18,375
관급자재비	135,056	131,844	-3,212
페기물처리비	-	3,084	3,084
총 공사비	1,382,715	1,364,212	-18,503

② 흙막이가시설 공사

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
가. 흙막이가시설	315,065	306,672	-8,393
나. 안전시설비	-	13,544	13,544
순공사비	315,065	320,216	5,151
제 잡 비	75,839	76,856	1,017
물가변동비	13,096	11,128	-1,968
도급공사비	404,000	408,200	4,200

조치의견

○ 감리단 의견과 같이 용비교 기초(말뚝) 및 흙막이가시설 공사를 실제 시공한 물량으로 정산함이 타당하므로 설계변경시 반영하고, 추후 설계변경(소)위원회에 상정 그 결과에 따라 최종 정산처리코자 함.

붙  임 : 감리의견서 2부.  끝.