투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	3차 설계변경 시행(직원관사아파트 리모델링공사)

1. 우리센터에서 시행하고 있는“직원관사아파트 리모델링공사”에 대하여 아래와 같이 3차 설계변경을 시행코자 합니다.

-  아    래  - -

가. 공 사 명 : 직원관사아파트 리모델링공사

나. 공사기간 : 2014. 5. 29 ~ 2015. 02. 28

다. 도 급 자 : 영보토건㈜  대표 최 영 록

다. 변경사유 : 시공수량 증가, 신규공정 추가

라. 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리,

난지물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비및부대비, 시설비

마. 공 사 비

구 분	당초금액	변경금액	증 ․ 감	비 고
총공사비	702,680,000	685,520,000	감)17,160,000
도 급 비	702,680,000	685,520,000	감)17,160,000
이 설 비	-	-	-

첨부  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 변경계약서 1부. 끝.

주무관	박재춘		시설팀장	권순회		물재생과장	김일운		난지물재생센터소장	02/06 가길현
협조자	주무관	지두연		관리과장	이재성
시행	물재생과-415	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동) 673-2번지	/
전화	02)300-8589	/전송	02)300-8587	/	wocnsqkr@seoul.go.kr	/	대시민공개