문서번호	토목부-2403
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		홍숭희	02/06 노우성
협조
	주무관		유근평

시점부 우수관로 변경 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

(토목부)

-강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사-

시점부 우수관로 변경 검토 고

시설물 유지관리기관(서초구 안전치수과)협의 의견을 반영하여 시점부 우수관로 변경을 검토 보고드림.

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원 (8차: 4,000,000천원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(8차 `14.10.1.~`15.2.28.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감  리  사 : ㈜동명기술공단

관련근거

❍ 서초구 안전치수과-11846호(`14.5.26.) 우수계획 협의 회신

❍ 동기강 2015-9호(`15.1.13.) 시점부 우수관로 변경 승인 보고

감리단 보고내용

❍ 당초 설계안

- 우수관(D=600mm, L=369m)을 SH우면2지구 저류지에 연결하여 방류하도록 설계되어 있음.

❍ 변경 설계안

- 우수관(D=800mm, L=227m)을 변경하여 양재천으로 직접 유하

※ 서초구 의견 : SH우면2지구 저류지로 유입되는 우수량이 증가하여 유지관리가 어렵고 저류지의 H･W･L(계획고수위)가 양재천의 계획고수위 보다 높아 도로 침수 발생 우려가 있어 양재천으로 직접 유하

❍ 현 황 도

❍ 주요 공사내용

공 종	규격	단위	당 초	변 경	증 ･ 감	비 고
터파기	토사	M3	2,175	2,759	584
되메우기	토사	M3	1,836	2,436	600
사 토	46.61km	M3	-	323	323
흄 관	D=600mm	M	369	-	369
흄 관	D=800mm	M	-	227	227
우수받이	300mm×800mm	EA	15	10	5

❍ 공사비 증･감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 ･ 감	비 고
토공	-	3,878	3,878
배수공	53,354	53,749	395
직접공사비	53,354	57,627	4,273
간접공사비	25,737	26,918	1,181
공급가액	79,091	84,545	5,454
부가가치세	7,909	8,455	546
총 공 사 비	87,000	93,000	6,000

검토 조치계획

❍ 서초구 및 SH공사 협의 결과에 의해 우수관경을 확대하여 양재천에 직접 방류하는 변경 설계안으로 감리단 검토의견에 따라 승인통보하고 설계변경 시 반영토록 조치하고자 함.

붙 임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 관련 공문 1부.  끝.