문서번호	한양도성도감-1211
결재일자	2015.2.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김종범		신추교	02/06 심말숙
협조

「한양도성 안내표지판 제작 및 설치」공사 변경추진

2015. 2.

한양도성도감

「한양도성 안내표지판 제작 및 설치」공사 변경추진

2014년 계약 체결되어 시범적으로 추진토록한 “한양도성 안내표지판 제작 및 설치” 공사는 우선 디자인이 마련된 낙서금지, 계측시행 안내판 위주로 변경 추진하고자 함

※ 아름지기 재단에서 안내판 디자인 보완이 완료되면 안내판 추가 설치 예정

Ⅰ		시범설치 용역개요

□ 공 사 명 : 한양도성 안내표지판 제작 및 설치

□ 설치업체 : ㈜피앤

□ 계약기간 : `13.12.27 ~ `15.2.20

□ 계약금액 : 56,216천원

□ 주요내용 : 지주형 안내판 32개, 판형안내판8개, 원형길표지판 교체 21개 등

Ⅱ		추진경위

□ 2013. 7 : 안내판 개선 디자인 기획 및 실시설계 용역발주

□ 2013. 8 ~ 12 : 안내표지판 개선 디자인 시안마련

- 한양도성자문위원회 자문2회, 서울디자인위원회 심의2회

□ 2013. 12 : “안내표지판 제작 및 설치 ”  공사 발주

□ 2014. 1. 3 : 시장보고 1차 (민간재단과 협업방안 모색 요청)

□ 2014. 4.30 : 시장보고 2차 (디자인 추가보완 요청)

□ 2014. 7.23 : 한양도성 안내판 디자인보완 및 실시설계 용역(아름지기 재단)

□ 2014. 9.18 : 시장보고 3차 (관련 전문가 의견을 모아 진행)

□ 2014. 10. 1 : 한양도성 자문위원회

- 내구성ㆍ모듈ㆍ고정방식 등 보완, 원형 길표지판 디자인 보완 필요

Ⅲ		설치대상 변경

□ 시범설치 대상 변경

- 안내표지판 변경 현황

구 분	당초수량	변경수량
판형안내판(지주형)	32	41
통합 안내판	8	3
길표지판(원형교체)	21	-
그루터기 안내	4	9
미끄럼주의(손잡이형)	15	18
우회로 차단휀스	-	2
우회방향 나무안내판	-	6
차단로프	-	6
풍화성돌 보존방안 임시안내	-	2

- 변경내용 : 이용주의 안내판 위주로 안내판 변경

․성벽 변형구간 계측시행 안내

․“성벽 위에 올가가지 마세요” 안내

․페인트 등 낙서금지 안내 등

□ 변경사유

- 위험구간에서의 시민 안전을 위해 이용주의 안내판으로 변경하여 우선설치

- 안내판 크기 축소 및 물량조정, 백악 탐방로 차단 및 우회안내 등

Ⅲ		설계변경

□ 시범설치 내용이 변경됨에 따라, 설계변경 추진

- 당초 금액 : 56,216천원 → 변경 금액 : 50,066천원(감6,150천원)

Ⅳ		행정사항

□ 변경 내용은 재무과에 통보하여 설계변경 계약추진

붙 임 :변경내역서 1부.  끝.