문서번호	배수과-811
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
김진성	이임섭	이규상		02/06 고인석
협 조
	급수계획과장		박기범
	급수운영과장		최철민
	주무관		김기범

『삼성․봉은배수지 통수 추진』 T / F팀 구성 운영 계획

2015.  2.

상수도사업본부

(급  수  부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

		목 차
Ⅰ. 추 진 배 경 1 Ⅱ. 추 진 경 과 1 Ⅲ. T / F팀 운영계획 2 Ⅳ. 세부 추진계획 3 Ⅴ. 행정사항 및 향후계획 4

『삼성․봉은배수지 통수 추진』

T/F팀 구성 운영 계획

건설이 완료된 삼성․봉은배수지의 통수를 위해 관련부서 T/F팀을 구성, 운영하여 단계별로 통수를 추진하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

◦ 삼성․봉은배수지는 준공 후 1년7개월이 지나도록 통수가 지연되었으나, 그간 통수 지연사유였던 관망 정비(11.4㎞) 및 지하철 9호선 통과구간 공급관로(D400mm, L=180m)가 마무리되었음.

◦ 통수시 문제점에 대해 외부 전문가 자문회의 등을 통해 통수추진계획을 수립하였으며, 분야별 전문가들로 T/F팀을 구성하여 원활히 통수를 추진하고자 함

☞ 문제점 : 수압 변동(3.3→6.6㎏/㎠), 유속변동(0.6→0.77m/s)으로 학동로 기존 관로(ø1000㎜, 1.8㎞) 내부 슬라임 탈락에 따른 적수발생 우려

Ⅱ		추 진 경 과

◦ 삼성․봉은배수지 건설	’13. 6.30

- 시설용량 : 삼성(30,000㎥, H.W.L 67m), 봉은(12,000㎥, H.W.L 40m)

- 급수세대 : 삼성(56천세대, 74,000㎥/일), 봉은(40천세대, 52,000㎥/일)

◦ 관망정비 및 지하철구간 공급관로 연결 완료	’14. 12.13

◦ 통수관련 외부 전문가 자문회의 개최	’15.  1.19

◦ 세부 통수추진 계획 수립	’15.  1.21

◦ 기존관 내부 내시경 조사	’15.  1.30

※ 본청 감사결과(’14.12.31) 배수지 미운영에 대해 지적된 사항임

Ⅲ		T / F팀 운영계획

□ T / F팀 구성 및 조직도

◦ 기  간 : ’15. 3. 1. ~ 배수지 통수시까지

◦ 주  관 : 본부 배수과, 강남수도사업소(급수운영과)

◦ 협력부서 : 본부 급수계획과, 기전설비과, 수질과, 급수운영과

◦ 협력업체 : 밸브 제조업체, 자동제어, 수배전반 업체

T/F 총괄

: 급수부장

기전팀

(팀장 : 기전설비과장)

통수추진 총괄팀

(팀장 : 배수과장)

현장운영팀

(팀장 : 강남수도 급수운영과장)

급수운영반

현장총괄반

기전설비반

협력업체반

현장운영반

(수계전환)

수질반

누수복구반

< T / F팀 조직도 >

□ 업무분장

◦ 통수추진 총괄팀(급수계획과 포함)

- 통수추진 업무 전반에 걸친 세부 추진계획 수립 및 통수업무 주관

- 학동로 D1000 공급관로 세척, 실증 테스트, 단계별 통수 추진

◦ 기전팀

- 봉은배수지 통합펌프 운영(시운전 포함)

- 펌프 유량변화 및 관압변동 사항 파악

- 펌프 회전수(VR볼륨운전) 및 PID(압력운전) 시운전 운영

◦ 현장운영팀

- 삼성․봉은배수지 구역 블록고립을 위한 잠금밸브 → 환원조치

- 단계별 통수에 따른 구간별, 구역별 수질검사 및 수질변동 체크(급수운영과 주관)

- 수계전환을 위한 밸브조절 및 비상시 누수복구 등 신속조치

Ⅳ		세부 추진계획

□ 세부 추진사항

◦ 관로연결 및 퇴수밸브 등 설치	’15. 1.21 ~ 2.28

- 내시경 조사(완료) : D1000 1개소, D300 2개소, 시편 1개소(D1000)

- 관로연결(D200 ~ 300 3개소) 및 퇴수밸브 설치(D200 ~ 400 5개소)

- 공기밸브(9개소) 및 수압게이지(3개소), 감압변(2개소) 설치

◦ 고립블록 환원, 수계전환	1.21 ~ 2.28

- 삼성, 봉은구역 블록고립을 위한 잠금밸브 ⇒ 환원조치 : 140개소

- 수계전환을 위한 밸브 조절(개 ⇒ 폐) : 90개소

◦ 세척작업	3.1 ~ 3.20

- 현장 실증테스트 실시로 수압 비교 등 파악 : 적수방지, 소출수 예방

- 현장 인력 배치하여 10개소 탁도 등 취약지구 수질확인 : 수질검사

◦ 봉은배수지 통합펌프 시운전(세척작업시 병행)	3.20

- 펌프 유량변화 및 관압변동 사항 파악

- 펌프 회전수(VR 볼륨운전) 및 PID(압력운전) 시운전

◦ 봉은배수지 단계별 통수(통수 예정)	3.20. 이후

- 총 7개구역에 맞춰 급수운영(펌프운영)을 3단계에 의한 순차적 통수추진

Ⅴ		행정사항 및 향후계획

□ 부서별 조치사항

◦ 배수과, 급수계획과

- T / F팀 운영은 통수추진 전과정에 수시로 관련회의 및 현장업무 추진

◦ 급수운영과, 수질과

- 수질검사, 공급과정 수질변동 체크, 비상시 긴급 대응 등 적극 협조

◦ 강남수도사업소

- 수계전환팀 및 누수복구팀을 구성하여 통수추진 전과정에 상시 운영될 수 있도록 조치

- 봉은배수지 통합펌프 시운전시 제어실 및 관련업무 담당자 비상근무 시행

◦ 기전설비과

- 통합펌프 시운전 등 기전설비 전반에 걸친 사항에 대해 적극 협조

- 협력업체와 유기적인 협조체계 구축할 수 있도록 조치

□ 향후계획

◦ 상기 T/F팀 구성과 관련하여 해당부서에서는 T/F팀 근무인원을 ’15. 2.12(목)까지 급수부(배수과)로 제출

- 강남수도사업소는 통수과정에 협력업체가 적극 참여할 수 있도록 조치하고, 협력 업체 참여인원 및 업무분장 등 추진계획 수립, 제출(기전팀)

- 그간 관련 시설물 보완조치 및 수계전환 진행사항 제출

◦ T/F팀 구성 이후  2.24(화) 실무자회의를 시작으로 통수를 시행하여 급수운영 안정화까지 운영.  끝.