투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(최종) - 2014년 관내 포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가) - 북부

우리사업소에서 시행중인 2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)-북부

나. 공사기간 : 2014. 04. 11 ~ 2015. 02. 28

다. 도 급 자 : 삼서건설(주)  대표 나 남 열

라. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 감	비고
총 공 사 비		680,000,000	680,000,000	-
도급비	공급가액	612,591,819	612,591,819	-
	부가가치세	61,259,181	61,259,181	-
	계	673,851,000	673,851,000	-
이 전 비		6,149,000	6,149,000	-

마. 설계변경사유 : 도급비 변동없이 물량증,감에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발),

노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

따로붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.    끝.

주무관	최완		도로보수과장	이석재		북부도로사업소장	02/06 이승진
협조자	관리단속과장	정수현		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-1239	(		)	접수		(		)
우	141-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 시설보수과 1층	/
전화	02-944-5455	/전송	02-945-5073	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개