투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	(기간)변경계약 체결 보고-제2처리장 유량조정 및 침전조 설치공사 기본 및 실시설계 용역

물재생과-683(2015.02.03.)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 보고합니다.

가. 계약건명 : 제2처리장 유량조정 및 침전조 설치공사 기본 및 실시설계 용역

나. 계약금액 : 금69,102,000원(금육천구백일십만이천원)

다. 계 약 일 : 2014년  09월  25일 (변경계약일 : 2015년 02월 05일)

라. 착 수 일 : 2014년  09월  25일

마. 완수기한 : 연장 20일

- 변 경 : 2015년  02월  26일

- 당 초 : 2015년  02월  06일

바. 변경사유 : 자문회의결과 반영 및 절대공기 부족

사. 계약업체 : 분담이행

- 대 표 : ㈜경보기술단 (☎ 02-521-7071)

- 도 급 : 녹원종합기술(주) (☎02-571-1113)

붙임 : 변경계약서 1부.  끝.

주무관	정은경		관리과장	김홍덕		중랑물재생센터소장	02/09 김동기
협조자
시행	관리과-1632	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개