내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	SH공사사장
(경유)
제목	「청년공간 무중력지대 대방동」 사업 대행계약 이행 협조

1. 무중력지대 대방동(청년종합활동공간) 시설설치 사업대행계약서 제5조

(사업기한) 및 SH공사 희망재생팀-284호(2015.1.30.) 관련입니다.

2. 청년공간 무중력지대 대방동 조성과 관련하여 부득이한 경우를 제외하고 시설 공사를 2015.2.27한 완료하기로 귀사와 사업 대행계약을 체결하였으나 추가적인 예산확보(1개월 지연)외에 별도의 부득이한 사유가 없음에도 귀사에서 준공 기한을 3개월 연장하여 제출함에 따라

3. 4월초, 개장 예정인 주말농장(대방동 340-5) 이용시민의 안전이 우려되고 청년활동 활성화 사업 및 무중력지대 운영에 차질이 우려 되는바, 시공업체 관계자, 설계자, 전문가 및 우리시와 협의하여 공사 일정을 재검토하고  ‘예정 공정표’를 2015.2.13.(목)한  제출하여 주시기 바랍니다. 다만 안전과 관련된 부문에 대하여는 공사기한 단축을 제외하여 주시기 바랍니다.

가. 기타 행정사항 : 건축법 제21조에 의한 착공신고서 관련서류 제출 긴급 협조

붙 임 : 1. 착공신고서 서식 1부.

2. 사업대행계약서(사본) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이남숙		청년지원팀장	손정아		청년정책담당관	02/09 이계열
협조자
시행	청년정책담당관-1028	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02- 2133-6578	/전송		/		/	대시민공개