문서번호	시설과-995
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	중부공원녹지사업소장
강민수	이종한	02/09 이용태
협 조

‘15년 공원등 시설개선 사업계획보고

2015. 2

‘15년 공원등 시설개선 사업계획보고

‘15년 공원 내 노후 및 성능이 저하된 공원등을 친환경적인 LED등으로 교체하여 전기요금 절약 및 조명효율을 향상시키고자 계획 보고 임.

관련근거

○ ‘15년 공원등 시설 개선 사업계획(공원녹지정책과-1449, ’15. 1. 28)

공원등 현황

○ 공원별 공원등 현황

공원별	공원등 수	광 원 별
		MH(NA)	CDM	PAR	삼파장	LED 교체 수	2015년 LED교체계획
남산공원	1,090	332	131		163	464
중랑캠핑숲	198	173			25
용산가족공원	146	135			11
훈련원공원	76	76					76
간데메공원	68	2			17	49	2
낙산공원	287	287					180
북서울꿈의숲	389		389
서울창포원	37			37
합계	2,291	1,005	520	37	216	513	258

○ 년도별 LED램프 교체 현황

구 분	계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
LED조명[개]	513	56	-	102	221	134

사업개요

○ 대상 공원 : 낙산공원, 훈련원공원, 간데메공원

○ 규  모

- 메탈150W × 253등 ⇒ LED램프 51W 251등 교체

· 낙산공원 : LED 램프 141등 및 LED보안등기구 39등

· 훈련원공원 : LED 램프 76등 및 노후 등기구

· 간데메공원 : LED 램프 2등

○ 사업기간 : 2015 2. ~ 2015. 6

○ 사 업 비 :100,000천원

추진계획

○ 2015.1. 30: ‘15년 공원등 시설 개선 사업 계획 통보(공원녹지정책과)

○ 2015. 2.   : 현장조사 및 설계

○ 2015. 2. ~ 3.: 빛공해방지 심의 요청

① 안건상정 (D-14일)		② 검토 및 보안		③ 위원회 상정안건 확정(D-2일)		④ 위원회 개최		⑤ 결과통보 (D+7일)

○ 2015. 3. : 조달 제3자단가 발주

○ 2015. 4. : 조달 제3자단가 계약

○ 2015. 5. : 납품완료

○ 2015. 5.~ 7. : 설치완료(연가단가 업체)

구매방법 : 조달 제3자단가

예 산 액 :100,000천원

○ 예산과목 : 공원내 공원등 시설개선, 시설비

개선효과 : 99,200KW/년 절약(약9,37400원/년)

○ 개선전 : 메탈150W × 253등 × 11시간 × 360일 ≒150,300KW/년

○ 개선후 : 메탈51W × 253등 × 11시간 × 360일 ≒51,100KW/년

○ 친환경적인 LED등교체로 조명효율을 향상 및 유지관리비 절감

교체 대상 현황 사진

LED램프만 교체	컷오프 LED등 교체	LED 램프 및 등기구 교체
낙산공원		훈련원 공원