문서번호	도로관리과-2153
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장안전팀장	도로관리과장
이문석		최연우	02/09 이택근
협조
	주무관		이옥휘

2015년 불량맨홀 정비계획 및 예산 재배정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
				36억원

2015. 2.

도시안전본부

도로관리과

2015년 불량맨홀 정비 계획 및 예산 재배정 계획

2015년 불량맨홀 정비 계획을 수립하고, 예산을 재배정하여 맨홀정비 업무에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		맨홀관리 현황

□ 맨홀 현황(2014.12.31 기준)

○ 맨홀 총괄 현황

구분	총계	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	지역난방	기타
서울시 전체	597,119	205,608	255,497	74,285	9,883	15,941	833	35,072
시도 (차도)	81,368	23,580	20,314	20,872	8,506	4,584	277	3,235

○ 관리기관 별 맨홀 총괄현황(특별시도 차도)

구분		총계	동부도로	서부도로	남부도로	북부도로	성동도로	강서도로	비고
총계		81,368	13,872	17,200	14,055	14,242	11,792	10,207
맨홀 종류	상 수 도	23,580	3,998	5,044	3,896	4,229	3,663	2,750
	하 수 도	20,314	3,388	3,997	3,094	3,594	3,199	3,042
	통 신	20,872	3,575	4,696	3,650	3,520	3,051	2,380
	전 기	8,506	2,155	1,644	1,586	1,381	779	961
	도시가스	4,584	561	986	982	732	707	616
	지역난방	277	86	29	16	33	24	89
	기 타	3,235	109	804	831	753	369	369

□ 2014년 맨홀정비 현황(2014.12.31 기준)

○ 맨홀정비 현황(서울시 총괄)

구분	총 계	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	기타
총계	9,063	2,560	3,402	2,182	361	247	311
도로사업소 정비실적	4,409	1,344	1,352	1,349	197	31	136
자치구 정비실적	2,449	440	1,046	741	30	23	169
맨홀관리기관 정비실적	2,205	776	1004	92	134	193	6

Ⅱ		2015년 맨홀정비 계획

□ 맨홀 정비공사 계획

○ 불량맨홀 전수조사 및 정비계획 수립

- 분기별 불량맨홀 전수조사 및 정비계획 수립

- 수시 순찰을 통한 불량 맨홀 정비 강화

○ 맨홀정비 시행 방안

- 불량맨홀 정비공사는 맨홀 관리기관과 통보하여 반드시 정비토록 협의

- 노후 포장도로 정비공사 시 불량 맨홀은 맨홀 관리기관과 협의하여 반드시 정비하고 포장공사 시행

- 불량맨홀 정비 기준

․ 평탄성 불량 정비(3m 직선자를 활용하여 5mm 이상 단차 발생시)

․ 맨홀 주변 포장파손 및 맨홀 뚜껑 및 받침 사이 단차 발생 맨홀 정비

○ 파손 유형별 맨홀정비 방법

- 맨홀 단차 발생(침하 및 돌출) 또는 맨홀 주변 파손 : 연간단가 업체 활용 정비

- 맨홀 뚜껑 및 받침 단차 발생 : 맨홀 관리기관에 맨홀 뚜껑을 제출받아 신규 맨홀로 교체하여 정비

- 맨홀 뚜껑 소음발생 : 맨홀 관리기관에 통보하여 정비 요청

○ 맨홀정비 시행 절차

불량맨홀 전수조사	→	불량맨홀 조사결과통보	→	불량맨홀 합동조사	→	불량맨홀 정비요청	→
도로관리청→ 맨홀관리기관		도로관리청→ 맨홀관리기관		도로관리청 맨홀관리기관		도로관리청→ 맨홀관리기관

도로관리청에 보수 위임된 불량맨홀 보수	→	맨홀 보수비용 산출 및 통보 (예고)	→	맨홀 보수비용 고지서 발부
도로관리청		도로관리청→ 맨홀관리기관		도로관리청→ 맨홀관리기관

□ 맨홀 정비공사 사후관리

○ 맨홀정비 사후관리 철저

- 맨홀 정비 이력 전산관리 철저(포장도로관리시스템 맨홀 이력관리)

․ 2013년, 2014년 정비 완료된 맨홀 이력관리 입력 철저

- 맨홀정비 이후 하자관리 철저(하자담보 책임기간 3년)

․ 하자 발생시  정비업체에 통보하여 즉시 정비

- 신기술 사후평가 철저(신기술정보마당 http://ct.kictep.re.kr)

○ 맨홀 정비비 부과 징수 철저(분기별 부과 및 징수)

Ⅲ		맨홀정비 예산 재배정

□ 불량맨홀 정비비 : 36억원(포장도로 유지보수 예산에 포함 편성)

○ 포장도로 유지보수 예산(시설비) : 557.26억원

- 노후포장도로 정비비 : 388.76억원

- 불량 맨홀 정비비    :  36.0억원

- 도로손상 긴급복구비 :  90.0억원

- 예방적 유지보수비   :  10.0억원

- 버스중앙차로 정비비 :  28.0억원

- 도로함몰 조사용역비 :   4.5억원

○ 예산과목 :  도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후 포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비(시설비)

□ 재배정 계획

○ 재배정 시기 : 2015. 2월중

○ 재배정 계획

- 상반기 : 전체 예산 36억원 중 30억원 재배정

(각 도로사업소별 5억원씩 균등 재배정)

- 하반기 : 사업소별 정비 물량을 파악하여 차별 재배정(6억원)

Ⅳ		향후계획

○ 2015. 2월중

- 건설신기술심의회 안건 상정 및 심의(도로사업소→기술심사담당관)

- 맨홀공사 예산재배정(도로관리과→각 도로사업소)

○ 2015. 3월중 : 맨홀공사 발주(도로사업소→재무과) 및 계약

○ 2015. 3월 ~ 2015. 12. : 공사시행

○ 2015. 12월말 : 공사 준공.  끝.