문서번호	토목부-2600
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
강철규		권혁대	02/09 노우성
협조

“용비교~행당중간 도로개설공사”

실시공 물량으로 정산시행 검토보고

(강교정산 및 포장변경 )

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

토  목  부

실시공 물량으로 정산 시행 검토보고

【 용비교 ~ 행당중간 도로개설 공사 】

용비교 확장(신설) 교량과 기존 교량의 처짐 차이를 보완하기 위해  브라켓 설치 및 교면포장 변경하여 실시공한 물량으로 정산한 사항에 대하여 검토 보고드림

· 신설교량의 최소두께(내민보 길이 150cm, 두께 34cm이상) 확보를 위해

일부구간에 브라켓 추가설치 및 포장두께 변경(아스콘 T=8cm → LMC T=4cm)

관련근거

○ PH15-용행감-023호(2015. 2. 9.) : 실정보고 승인요청

(강교정산 및 포장변경)

공사개요

○ 공 사 명 : 용비교 ~ 행당중간 도로개설공사

○ 공사위치 : 성동구 금호4가동 ~ 성수1동 구간

○ 공사규모 : 도로(용비교) 확장 및 도로개설

- 확장폭 : 5.2m(왕복 4차로 → 6차로), 연장 719m

○ 공사기간 : 2007. 3. ~ 2015.12.

○ 도 급 비 : 26,477백만원

○ 시 공 사 : 한신공영(주)

○ 감 리 사 : ㈜평화엔지니어링, ㈜선진엔지니어링

감리의견

○ 확장(신설)교량과 기존 교량의 처짐으로 인한 대응방안으로 일부구간 브라켓 설치 및 교면포장 공법을 변경하여 내구성 및 사용성을 증대시키고, 아울러 실시공 수량에 정산함이 타당함.

- 신설 교량의 최소두께(내민보 길이 150cm, 두께 34cm이상) 확보를 위해 일부구간 브라켓을 추가 설치하고,

· Block#1 중앙부 9개소(L=40m), Block#2 중앙부 11개소(L=50m)

- 포장두께 변경(ASP : T=8cm → PCMC : T=4cm) 시공

[현황도면]

구분	당 초	변 경	비고
강교 단면도		Block#1 중앙부 9개소(L=40m), Block#2 중앙부 11개소(L=50m) Block#3, 4 변경없음
횡단면도	교면포장 T=8cm (개질아스콘-SBS PMA)	교면포장 T=4cm (PCMC)

[개략공사비]

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
가. 강교정산	3,662,748	3,632,701	-30,047
나. 교면포장	66,750	123,695	56,945
순공사비	3,729,498	3,756,396	26,898
제 잡 비	897,317	903,018	5,701
물가변동비	153,785	153,086	-699
도급공사비	4,780,600	4,812,500	31,900
관급자재비	60,225	0	-60,225
페기물처리비	0	0	0
총 공사비	4,840,825	4,812,500	-28,325

조치의견

○ 감리단 의견과 같이 확장(신설)교량과 기존 교량의 처짐을 보완하기 위해 일부구간 브라켓 설치 및 교면포장 변경하여 내구성 및 사용성을 증대시키고, 실시공한 물량으로 정산함이 타당하므로 추후 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 감리의견서 사본 1부.  끝.