문서번호	설비부-1700
결재일자	2015.2.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
곽용길		이달영	02/09 박기형
협조

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』

공사 준공기간 연기 및 4차수 계약 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』

공사 준공기간 연기 및 4차수 계약 검토보고

『강남순환도시고속도로8공구 건설사업』 선행공정인 토목공사의 공정지연으로 준공기한(총차)을 연기하고자 하며, 4차수 계약을 아래와 같이 시행하고자 보고 드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로 8공구 구룡지하차도 전기공사

○ 위    치 : 서울시 서초구 양재동 407-17

○ 규    모 : 수전설비 700KVA, 터널등 967등, 가로등 84등, 기타 1식

○ 공사기간 : ‘12.08.02 ~ ’15.02.28

○ 공 사 비 : 1,098,636,000원

○ 시 공 사 : ㈜진영전력 대표 김선길

○ 감 리 사 : ㈜동명기술공단 종합건축사사무소

관련근거

○ 동기강(전) 2015-44호(’14.02.06) 구룡지하차도 전기공사(4차) 계약내역 및 공사기간 연기 실정보고

보고내용

○ 준공기한 연기

- 사유 : 선행공정인 토모공사의 방음벽 기초공사, 보차도 설치공사 등의 공정부진으로 후속공정인 전기공사의 가로등 터파기공사, 배관배설공사 등의 시공이 불가함.

- 내용 : 준공기한 변경

구 분	당 초	변 경	비고
전기공사(총차)	’12.08.02.~’15.02.28	’12.08.02.~’15.12.31	10개월연장

- 귀책사유 : 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 공사금액 : 변경없음

조치의견

○ 선행공정인 토목공사의 공정부진에 따라 후속공정인 전기공사(총차)의 준공기한을 2015.12.31.까지 연기하고, 4차수 계약을 하여 시공에 만전을 기하자 하며, 재무과 및 건설총괄부에 준공기한 연기 와 4차수 계약의뢰하고자 함.

따로붙임 : 책임감리원 전기공사 준공기한 연기 및 4차수 계약 요청 실정보고 1부.  끝.