함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(제4회 최종) 계약의뢰(2014년 동작 영등포 시설물)

우리사업소에서 시행중인 『2014년 동작 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)』에 대한 설계변경(제4회 최종) 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 동작 영등포구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

나. 수 급 자 : 천윤건설 대표 정수철

다. 계약기간 : 2014. 4. 14 ~ 2015. 4. 30.

라. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

- 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비 및 부대비, 시설비

마. 설계변경 사유

- 공사현장에 적합한 시공에 따른 계약물량 증·감 발생

- 퇴직공제부금 및 건설기계대여대금 실정산

바. 설계변경 내역                                                (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감
공급가액	655,009,091	654,410,000	감)599,091
부가가치세	65,500,909	65,441,000	감)59,909
도 급 액	720,510,000	719,851,000	감)659,000

붙 임 1. 설계변경시행품의서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의의결서 1부.

4. 합의서 1부.

5. 제비율 검증표 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	이승영		주무관	김대성		시설관리과장	02/09 우종근
협조자
시행	시설관리과-2798	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4599	/전송		/		/	대시민공개